투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	「서울대공원캠핑장 위험시설 정비사업 실시설계용역」 준공기한 연장 시행

「서울대공원캠핑장 위험시설 정비사업 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 과업기간을 연장 시행코자 합니다.

1. 용 역 명 : 서울대공원캠핑장 위험시설 정비사업 실시설계용역

2. 위    치 : 과천시 막계동 산59-2 서울대공원 캠핑장

3. 과업내용 : 모험놀이시설, 배수로, 옹벽 등 노후 및 위허시설 정비

4. 도 급 자 : 나원이엔지(주) 대표 장경규

5. 계약금액 : 금11,521,000원

6. 용역기간 연장

가. 당    초 : 2014. 6. 17 ~ 2014. 7. 26

나. 변    경 : 2014. 6. 17 ~ 2014. 8. 10

7. 연장사유 : 붙임(연기의뢰서) 참조

8. 내역변경 : 없음

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부(별첨). 끝.

주무관	김성태		주무관	김흔진		조경과장	07/25 代윤희숙
협조자	주무관	김희준		총무과장	이경로
시행	조경과-4045	(		)	접수		(		)
우	427-080	경기 과천시 막계동 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7542	/전송	02-500-7993	/	kst2006@seoul.go.kr	/	대시민공개