문서번호	시설과-4705
결재일자	2014.9.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
정연준	김인규	이규상		09/01 정득모
협 조
	생산부장		박용철

공정보고회(8월) 개최 결과 보고

2014. 9.

상수도사업본부

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

공정보고회(8월) 개최 결과 보고

우리 본부에서 시행 중인 정수센터 고도정수시설공사 등 주요사업에 대한 8월 공정보고회 개최 결과를 보고 드림.

Ⅰ		보고회 개요

□ 일 시 : 2014.08.28(목) 14:00 ~ 15:30

□ 장 소 : 본부 4층 회의실

□ 참석자(17명)

○ 본    부(5) : 부본부장, 생산부장, 시설안전부장

기전설비과장, 시설과장

○ 정수센터(4) : 정수과장(구의․뚝도․암사․강북)

○ 공사관계자(8) : 감리단장, 현장소장

□ 대상사업(4개)

○ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 강북정수센터 고도정수처리시설공사

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

□ 회의안건 : 공사장별 공정현황, 추진계획, 주요현안사항 논의 등

Ⅱ		현장별 공정현황

(2014.8.28 기준)

공정률(%)	암 사	강 북	구 의	뚝 도
계 획	98.3	98.0	92.8	52.2
실 적	97.4	98.0	93.3	52.3
대 비(%p)	-0.90	0.00	0.50	0.10

Ⅲ		주요건의 및 논의사항

□ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 대체적으로 조경 관리가 잘되었지만 금년 여름은 가뭄이 심하여 소나무 몇그루가 고사했으므로 조치요망(암사 정수과장)

□ 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 향후 오존투입 등 고도처리 공정에 대한 전반적인 시스템 점검을 완벽히 하도록 하겠음(강북 정수과장)

□ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 전체 시운전 계획내용에 대한 정밀한 검토를 통해 신뢰성 확보하기 바람(구의 정수과장)

○ 제2정수장 정수지에서 착수정 회수시 원수가 훼손되는 문제점을 보완하기 바람(구의 정수과장)

□ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 2계열 침전․여과지에 설치된 스컴제거기 점검과 약품투입시설 보완 점검 조속처리(뚝도 정수과장)

Ⅳ		본부 당부사항

□ 부본부장

○ 암사 고도는 시장님이 참석하시는 준공식을 11월초에 개최하는 것으로 계획하고 있음.

○ 뚝도 고도는 내년 6월까지 고도처리공정 20만톤을 통수할 수 있도록 공정관리하기 바람.

○ 구의 고도는 현재 부대시설 공사가 많이 남아있는 상황으로 장비․ 인력을 추가투입하도록 하며, 메인도로는 중층까지는 포장하도록 하기 바람.

□ 생산부장

○ 정수슬러지를 이용한 도로포장과 관련 생산부와 협의하여 최대한 많은 물량이 시공되도록 하고 다음 공정보고시 추진상황에 대하여 보고 바람.

□ 시설안전부장

○ 4개 현장 모두 구조물 크랙관리에 철저를 기하고 균열대장 관리, 균열보수 및 누수개소 보수에 철저를 기하여 외부 점검에 지적사항이 없도록 하기 바람.

○ 공사 완료후 정수센터에 외부손님․견학자 등 방문이 있으므로 세심한 부분(외부난간․계단 용접등)도 정밀시공을 하여 부실 시공으로 인한 이미지가 훼손이 없도록 하기 바람.

○ 경계 울타리의 두께, 굵기 등 사소한 부분에도 정밀검측을 하는 등 정성을 다해 시공하여 공사후 민원이 발생치 않도록 하기 바람

○ 도로 포장시 측구와 단차없이 시공하고 라인마킹도 완벽히 시공하기 바람.

□ 기전설비과장

○ 구의 고도 잔류오존제거시설 요청안에 대하여 감리단에서는 보완하기 바람.

○ 구의 고도는 11월 통수를 위해서 계측제어분야는 박차를 가해야 함.

○ 강북 고도는 9.15일 본부장님 시운전 방문점검이 계획되어 있으니 준비에 만전을 기하기 바람.

○ 뚝도 고도 약품투입지점 개선방안은 2계열 준공전까지 서둘러 주기 바람.

□ 시설과장

○ 추석명절기간 강우에 대비하여 배수시설 정비하기 바람.

○ 각 현장별 근로자 안전․품질관련 교육을 실시하여 안전사고가 없도록 하기 바람.

○ 준공이 얼마 안남은 현장은 예비준공검사 준비에 철저를 기하기 바람.

Ⅴ		향후계획

□ 8월 공정보고회 개최결과 통보

○ 공정보고 회의내용을 관련부서 및 감리단에 통보하여 보완토록 조치

□ 9월 공정보고회 개최(9.30 예정)

○ 9월 공정보고회시 본부 당부사항에 대한 조치결과 보고

붙임 : 1. 외부 참석자 명단 1부.

2. 공정회의 사진 1부.  끝.