문서번호	녹색에너지과-16991
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신재생에너지팀장	녹색에너지과장
이경택		임병욱	09/01 권민
협조
	자원회수시설팀장		정연구

출장결과 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

녹색에너지과

- 탄천하수열 사업 열배관 공사현장 -

출장결과 보고서

□ 출장장소 : 강남자원회수시설내 하수열 이용 집단에너지 공급 열배관 매설현장

□ 출장일시 : 2014. 8.29(금) 16:20~18:10,

2014. 8.31(일) 15:00~16:00

□ 출 장 자 : 이경택

□ 출장목적

◯ 강남자원회수시설내 하수열 생산 열 배관 설치 공사와 관련하여 강남자원회수시설 운영사인 한국시거스㈜, 하수열 열배관 공사 업체인 포스코ICT㈜ 간 분쟁사항 조정

※ 열배관 설치공사 개요

□ 출장결과

<2014. 8.29>

◯ 각 사별 의견

- 한국시거스㈜

① 1-3, 2-1 구간 되 메우기 조속 완료, 1-4 구간 굴착금지 [자원회수시설 대정비 기간(11월) 종료 후 작업]

② 2-2 ~ 3구간 트레일러, 25톤 크레인 통행에 지장이 없는 상황 확인 전까지 굴착 금지

③ 소각장 굴뚝 주변인 2-1 구간 1/2 이상 되 메우기 하거나 5톤 트럭 주차 할 수 있도록 복공판 설치(비게 운반용 지게차 작업공간 확보)

④ 포스코ICT㈜의 공사계획에 대한 최종확인을 서울시의 이름으로 공문화 작업 요구

- 포스코ICT㈜

① 1-3, 2-1 구간 9월 1일(월)까지 되 메우기 작업 완료, 1-4 구간 자원회수시설 대정비 일정에 차질이 없도록 공사를 시행할 예정이니 굴착 협조요청

② 2-2 ~ 3구간 트레일러, 25톤 크레인 통행에 지장이 없는 상황 확인 전까지 굴착 금지하겠음

③ 소각장 굴뚝 주변인 2-1 구간은 비게 반입 5톤 트럭이 주차 할 수 있도록 복공판 보강 설치

◯ 조정결과

① 1-3, 2-1 구간 되 메우기 및 가포장 조속 완료

② 1-4 구간 9월 1일(월) 24까지 공사완료 조건으로 굴착 공사 재개

※ 특기사항(붙임 현장사진 참조)

(운영사 직원들이 굴삭기 작업반경 이내로 들어와 8.28일 일부, 8.29일 약 7시간 동안 굴착공사 중단됨)

□ 현장점검 방문시 자원회수시설 운영사인 한국시거스㈜ 직원 10여명이 1-4구간에서 작업중인 굴삭기 주변으로 몰려가 열배관 공사 관계자들과 뒤엉킴 발생

□ 포스코ICT 관계자에게 굴삭기를 가동을 중단토록 하고 한국시거스 직원들은 굴착현장으로 부터 격리시킨 후 각 사별 이견에 대한 조정을 실시 (물리적 출동로 인해 부상자 등 다친 사람은 없었음)

<2014. 8.29>

◯ 작업내용

- 자원회수시설 대정비 작업용 강관 비게 반입작업은 토요일부터 일요일까지 굴뚝 주변 2-1 구간을 통하여 반입 완료 : 한국시거스㈜

- 1-3구간 되 메우기 완료, 1-4 구간 열배관 설치공사 중 : 포스코ICT

- 열배관 공사 시행 포스코ICT 관계자들에게 1-4, 2-1 구간을 9월 1일 24:00까지 트레일러, 25톤 크레인 등 작업차량 출입 가능토록 독려

□ 출장자 의견

◯ 자원회수시설 운영사와 열배관 설치 공사 시행사간 물리적 충돌사항은 유사사고가 재발되지 않도록 각 사에 책임자에 대한 조치를 요구하고

◯ 또한 자원회수시설 대정비 일정에 차질이 없도록 상호 협조토록 요청하고자 함

- 대정비 작업 : 사전작업을 통해 9.14일자 소각로 가동중단 후 진행

- 열배관 공사 : 10.24까지 한국지역난방공사 메인 열배관에 접속 완료

붙임 : 열배관공사 현장점검 사진 1부. 끝.