문서번호	시설보수과-3396
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	09/01 정진오
협조
	주무관		이경수

자체(외부전문가 합동) 정밀점검 시행결과

[신답, 동일로, 군자교 동측 지하차도]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

성동도로사업소

【시설보수과】

자체 정밀점검 시행결과 보고

[신답, 동일로, 군자교 동측 지하차도]

‘시설물의 안전관리에 관한 특별법’에 준하여 실시토록 되어 있는 정밀점검을 기술용역 타당성심사 결과 외부전문가를 활용한 자체 점검으로 시행토록 통보됨에 따라 내부 계획에 의거 정밀점검을 시행하고 그 결과 보고임

점검대상 시설물 및 참여 외부전문가

시설물명	시 설 규 모	점검기간	담당자 (정.부)	참여기술자	비고
신답 지하차도	Box = 128.0m, 옹벽 = 362.0m	2014.04.01 ~2014.08.31	임승민 이경수	권오훈 강남구 정태영
동일로 지하차도	Box = 55.0m, 옹벽 = 265.0m
군자교동측지하차도	Box = 66.0m, 옹벽 = 188.0m

추진사항

❍ 2014.04.01 : 자체 정밀점검 착수(참여기술자 현장투입)

❍ 2014.06.02 : 합동점검 시행(담당자 2명, 참여기술자 3명)

❍ 2014.08.14 : 자문회의 개최(자문위원 5명)

❍ 2014.08.29 : 보고서 제출

정밀점검 시행결과(자문회의 포함)

❍ 신답지하차도 신축이음 누수에 대한 검토 및 조치 방안 필요

❍ 동일로지하차도 U-TYPE부분 코핑부의 노화로 인해 보수방안 필요

❍ 동일로 지하차도 제한높이를 명시하여 안전사고 예방에 철저 필요

❍ 탄산화 시험위치 정확히 명시하여 유지관리 할 수 있도록 조치 필요

❍ 개략공사비는 부대시설 및 제경비 포함 산정할 필요 등

❍ 보수.보강 공사비 산정

(단위 : 천원)

시설물명	총 공사비	1순위	2순위	3순위	비고
신답 지하차도	199,365	99,546	99,819	-	B등급
동일로지하차도	16,728	1,134	15,594	-	B등급
군자교동측지하차도	41,195	2,688	38,507	-	B등급

조치 및 향후 계획

❍ 점검결과에 대한 조치방안 강구 및 검토 반영

❍ 점검(자문회의 포함)에서 제시된 보수.보강공사는 일상유지 보수업체로 하여금 공사토록 조치

❍ 도로관리시스템 및 시설물정보관리종합시스템(fms) 정밀점검내역 입력

❍ 참여기술자 인건비(점검수당) 및 인쇄비 등 지급(7개조 일괄 지급)

붙임  시설물별 점검 보고서 각 1부. 끝.