투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2014년 난지수계 하수차집시설물 유지보수공사)

1. 우리센터에서 시행하고 있는“2014년 하수차집시설물 유지보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 4. 16 ~ 2014. 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜ 서황건설 대표 박경석외 1

라. 변경사유 : 시공수량 증․감, 신규공종 추가

마. 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리,

난지물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

바. 공 사 비

구 분	당초금액	변경금액	증․감	비 고
총공사비	421,207,000	421,207,000	-
도 급 비	421,207,000	421,207,000	-
관 급 비	0	0	-
이설비및기타	0	0	-

첨부  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경서 1부.  끝.

시설팀장	권순회		물재생과장	김일운		난지물재생센터소장	09/01 정흥순
협조자	주무관	정충모		관리과장	김웅남
시행	물재생과-2562	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02)300-8563	/전송	02)300-8587	/	plpel@seoul.go.kr	/	대시민공개