문서번호	건설총괄부-16027
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기획예산과장	건설총괄부장	시설국장		도시기반시설본부장
박해진	최갑영	강홍기	이광세		09/01 천석현
협 조
	도시철도국장			김준기

도시기반시설본부 공사 공정관리 회의개최 계획

2014. 9.

도시기반시설본부

(건설총괄부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 ■
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 ■	(	건설회사 등	)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	구청 등	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사,도시철도공사등	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

도시기반시설본부 공사 공정관리 회의개최 계획

□ 관련근거

	<시장님 요청사항 ('14.8.19)>
◦ 도시기반시설본부에서 시행하는 각종공사(장충체육관, 고척돔구장, IT컴플렉스, 서울과학관 등)가 지연될 경우 유관기관, 시설의 준공을 기다리는 시민, 관련 민간기업 등 여러곳에 어려움이 발생함. ◦ 이런 시설들의 공정을 확인하고 점검할 수 있는 회의를 개최해 주기 바람. - 이 회의에는 도시기반시설본부 뿐만 아니라 시 주요간부, 해당 산하기관, 투자출연기관 등이 함께 참여할 수 있도록 해주기 바람.

□ 추진방향

○ 공사 준공시까지 유관기관 등과 지속적인 공정관리 회의 개최

○ 공사 진행중 시민 불편사항 및 문제점 등을 공유 해결방안 모색

□ 선정기준

○ 당초 계획대비 공정이 지연된 사업 우선선정

○ 민원 및 사업시행자와 분쟁 등 중점관리 사업장

□ 공정(중점)관리 대상사업 : 13건

<도로인프라 건설> - 6건 ① 동부간선도로 확장공사 ② 강남순환 도시고속도로 건설 ③ 응봉교 확장 및 성능개선공사 ④ 신림～봉천터널 도로건설공사 ⑤ 율곡로(창경궁 앞)도로구조 개선사업 ⑥ 월드컵대교 건설공사 <수해방지시설> - 1건 ⑦ 잠원 2 빗물펌프장 신설공사	<공공건물 및 시민 편의시설 건립> - 3건 ⑧ 서남권 돔 야구장 건립공사 ⑨ 장충체육관 리모델링 공사 ⑩ IT컴플렉스 건립공사 <도시철도망 확충> - 3건 ⑪ 9호선 2단계 건설공사 ⑫ 하남선(5호선 연장) 건설사업 ⑬ 경전철 건설사업 (우이～신설, 신림선, 동북선)

□ 공정 관리회의 개최

○ 개최시기 : 공사 준공시까지 월 1회 개최원칙(‘14.10월부터～)

○ 참석대상 : 공사부서, 시 주관부서, 시설운영기관, 공사관계자 등

○ 내    용 : 공사추진 현황, 현안사항 및 해결방안 등

요일	사업명	주관부서	참석대상	준공 예정일
첫째주 월요일 (14:00)	① 동부간선도로 확장공사	시설국 토목부	도시안전실,노원구청, 도봉구청, ㈜한라 등, 동부 엔지니어링	‘16.12월
첫째주 목요일 (14:00)	② 강남순환 도시고속도로 건설	시설국 토목부	도시안전실,민자사업단, 임광토건,서영엔지니링 등	‘16.5월
둘째주 월요일 (14:00)	③ 응봉교 확장 및 성능개선공사	시설국 토목부	도시안전실,성동구청, 한신공영,건화엔지니어링	‘15.12월
	④ 신림～봉천터널 도로건설공사		도시안전실,도로계획과, 지에스건설,신성엔지 니어링	‘17.12월
둘째주 목요일 (14:00)	⑤ 율곡로(창경궁 앞)도로구조 개선사업	시설국 토목부	도시안전실,중구청,북일 종합건설,한국해외기술공사	‘15.6월
	⑥ 월드컵대교 건설공사		도시안전실,마포구청,영등포구청,삼성물산,포스코 엔지니어링	‘15.8월
	⑦ 잠원 2 빗물펌프장 신설공사	시설국 방재 시설부	도시안전실,강남구청, 에스트건설,신명건설기술공사(감리단) 등	‘15.12월
셋째주 월요일 (14:00)	⑧ 서남권 돔 야구장 건립공사	시설국 건축부	문화관광디자인본부, 선엔지니어링(감리단) 현대산업개발 등	‘15.8월
	⑨ 장충체육관 리모델링 공사		문화관광디자인본부 펨코엔지니어링(감리단) 성지건설 등	‘14.12월
셋째주 목요일 (14:00)	⑩ IT컴플렉스 건립공사	시설국 건축부	정보화기획단,건원엔지 니어링(감리단), 대림산업 등	‘16.2월
넷째주 월요일 (14:00)	⑪ 9호선 2단계 건설공사	도시철도국 토목부	서울메트로,도시교통본부, 유신,현대산업개발 등	‘14.12월
	⑫ 하남선(5호선 연장) 건설사업	도시철도국 계획부	경기도,하남시,LH공사, SH 공사, 도시철도공사, 강동구	‘18.12월
넷째주 목요일 (14:00)	⑬ 경전철 건설사업 (우이～신설, 신림선, 동북선)	도시철도국 사업부	대우건설,평화엔지니어링 등	‘16.11월 (신림,동북 조기착공)

□ 행정사항

○ 공사부서 주관 사업별 공정 관리회의 개최(‘14.10월부터～)

○ 공정관리 회의 부별 실적관리

공정관리 회의 추진실적 카드( 월)

사 업 명
사업개요		공사기간 :			당초준공일
					예정준공일
총 공사비				시공사
				감리
				설계
개최일자			참석인원		참석기관
공정관리회의	안건	○ ○
	주요내용	○ ○ ○
추진상 애로사항 (민원,예산,유관기관 협조 등)		○ ○ ○
향후 계획		○ ○

※ 서식은 부서별 특성에 맞게 변경가능