문서번호	총무과-13352
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	총무부장
강상천	최대봉	09/02 서영관
협 조
	기획예산과장		박병현
	주무관		장보금

성동지대사무소

청사 주변 담장 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				8백만원

2014. 9

한강사업본부

총 무 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

성동지대 사무소 청사 주변 담장 설치 계획

성동지대사무소 청사 1층 외부공간이 노숙자 상습거주 및 청소년의 탈선행위 장소로 이용되는 등의 문제점이 있어 청사 1층 외부공간에 투시형 담장을 설치하여 청사 주변의 우범화를 방지하고자 함

■ 사업기간 : ‘14. 8. 28 ~ ‘14. 9. 15

■ 사업내용

❍ 성동지대사무소 청사 주변 담장 설치 공사

❍ 공사내용

- 투시형 담장, 출입문 설치

■ 소요예산 : 7,920천원 (부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 세부사업 (한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비)

■ 추진방법 : 수의계약

■ 추진계획

❍ 2014.  8. 28 ~  8. 31 : 현장조사 및 계획 수립

❍ 2014.  9.  1 : 담당설치 계획 방침

❍ 2014.  9.  2 ~  9.  5 : 계약 및 공사 착공

❍ 2014.  9.  5 ~  9. 15 : 공사 추진

❍ 2014.  9. 16 : 준공(예정)

별첨 : 1. 소요예산 산출서 1부.

2. 누수현황 1부.

# 별첨 1

소요예산 산출서

○ 총공사비 : 7,920천원 (부가가치세 포함)

1	정 비 대 상		성동지대사무소 청사 주변 담장 설치
2	정 비 내 용		청사 주변 투시형 담장, 출입문 설치
3	산 출 금 액								단위:천원
연번	구 분		규 격	수량	단위	단 가		금 액	비 고
1)	재료비 (직접재료비)			식	1	3,187		3,054
2)	노무비	2)-1 소계		식	1	2,845		2,801
		2)-2 직접노무비		식	1	6,607		2,568
		2)-3 간접노무비		식	1	238		233
3)	경비	3)-1 소계		식	1	308		298
		3)-2 보험료 등		식	1	0		0
		3)-3 기타경비 등		식	1	308		308
4)	간접비	4)-1 소계		식	1	860		847
		4)-2 폐재류처리비		식	1	0
		4)-3 일반관리비	6%	식	1	380		369
		4)-4 이윤	15% 미만	식	1	480		478
5)	소 계							7,200
6)	부가가치세		10%					720
7)	합 계							7,920

# 별첨  2.

청사 주변 현황사진

청사 1층 음주 현장

노 숙 현 장