포장복구공사 준공연기 보고서

★주무관	주무관	급수운영과장		결재
강재성	김광운	09/02 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-21540

2014년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속) 감독업무 수행중 준공기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2014. 9. 2.

보고자 : *********************

공사현황

공사명 : 2014년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사

도급자 : ****************

작업지시 현황

작업지시번호	위 치	공사종별	공사기간	비고
중랑구-198	망우동 420-49	개량	‘14.08.22~’14.09.02	자재적치
성동구-89	송정동 73-21	개량
성동구-90	송정동 99	개량

보고내용

준공기한 연기사유 : 포장복구 공사를 위하여 현장을 방문하였으나, 자재를 적치하고 있어 공사가 불가한 상태임.

보고자 의견

위와같은 실정으로 포장복구 작업을 할 수 있는 여건이 형성될 때까지 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

-  당초 공사기간 : ‘14.08.22 ~ ’14.09.02

-  변경 공사기간 : ‘14.08.22 ~ ’14.09.19

따로붙임 : 현장 사진 1부.  끝.