함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 책임건설사업관리자
(경유)
제목	구의 재건설 및 고도시설공사 계약금액조정 심사 결과 통보(약품배관 등)

1. 구의CM 제2014-4289(2014. 8.18)호와 관련입니다.

2. 「구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사」와 관련 ‘약품배관 및 샘플링펌프 등 재질변경’ 건에 대한 계약금액 조정 심사 결과를 아래와 같이 알려드리오니 설계변경시 반영하여 주시기 바랍니다.

○ 심사결과                                             (단위:천원)

주요 내용	심사 요청액 및 결과			비 고
	당 초	변 경	증감액
약품 및 샘플링배관 등 재질 변경	증)537,900	증)454,928	감)82,972	자재단가, 공량 조정 총공사비 증액 없음

붙임  1. 계약금액검토 결과 통보서 및 검토결과서 각 1부.

2. 계약금액 조정내역서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박태원		기전설비과장	09/02 서대훈
협조자
시행	기전설비과-5882	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (생산부)	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	parkteria@seoul.go.kr	/	대시민공개