문서번호	도시철도설비부-8109
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
김창환		김영하	09/02 정찬웅
협 조

	지하철 9호선 2단계 신호보안설비공사
	준공기한연기검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.   .

도시철도국 설비부

(신호과)

	지하철 9호선 2단계 신호보안설비공사
	준공기한연기검토

우리부에서 시행중인 서울지하철 9호선 2단계 신호보안설비공사의 원할한 시운전과 개통을 위하여 본 공사의 준공기한을 연기하고자 보고드리는 사항임

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 2단계 신호보안설비공사

○ 계 약 자 : (주)삼영전업사 외 1개사

○ 계 약 일 : 2014.2.13.(계약번호 : 14000115)

○ 계약내용

구 분	계약금액(원)	공사기간	준공
총 차	3,314,962,400	2013.1.24.~2014.9.20	진행
1차	1,852,000,000	2013.1.24.~2014.1.23.	준공
2차	1,162,962,400	2013.9.26.~2014.2.10.	준공
3차	300,000,000	2014.2.18.~2014.9.20.	진행

□ 준공기한연기 검토

○ 준공기한연기 사유 : 선행 주 공정인 토목, 건축, 설비공사 등의 준공기한 미도래와 9호선 연장구간 시설물 인계인수, 시운전, 개통 일정을 감안 개통 이후로 연기

※ 계통예정 : 2015. 3.

○ 준공기한연기 요청 내용

구 분	계약금액(원)		준공기한
			당초	변경
총 차	3,314,962,400	변경 없음	2014.9.20.	2015.3.31.
3 차	300,000,000		2014.9.20.	2015.3.31.

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금부과여부 : 미부과

□ 조치의견

○ 9호선 2단계 신호보안설비공사의 준공기한을 2015.3.31.일까지 연기 시운전, 시설물 인계·인수, 계통 등 일정에 맞춰 추진하고,

○ 계약기간의 연장은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 준용

→ 안전행정부예규 74호 `14.2.7, 제8절 제2항(계약기간의 연장)

첨부 : 준공기한 연기 요청원 및 동의서 1부.  끝.