투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(경제정책과장)
(경유)
제목	서울과학관 공사 추진현황 알림

1. 우리본부에서 추진 중인 서울과학관 건립공사와 관련입니다.

2. 2014.08.20.(수). 14:00. 귀 부서의 주관 하에 실시한 서울과학관 설계검토 자문회의(경제정책과-9643호(2014.08.19. ; 서울과학관 설계검토 자문회의 참석요청)와 관련하여 서울과학관 건립 공사진행상황을 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 서울과학관 건립공사

나. 공사기간 : 2014.01.13. ~ 2016.01.12.

다. 도급금액 : 99억원(건축/토목/조경)

라. 현재공정 : 기초파일공사 완료(100%).

※ 기초터파기는 2014.08.20.이후 중단 상태임.

3. 특히, 당 현장은 공사진행 중 대량의 폐기물과 폐토석의 매립층 발견 등 당초설계(미래창조과학부에서 설계 담당)에 없었던 부분의 해소에 상당기간이 소요되었을 뿐만 아니라, 현재 귀 부서에서 설계검토 중인 전시공간 확충을 위한 전시실 기둥간격 조정 등 변경 사항은 경우에 따라서는 현재 진행 공정의 특성상 예상치 못한 추가공사비는 물론 기 시행분에 대해서도 상당한 매몰비용이 발생할 우려가 있음을 알려드립니다.

4. 전시시설(교과부에서 기본설계 담당)에 대해서는, 교육과학기술부(현, 미래창조과학부)와 업무협약 체결 당시 과학관 전문인력을 서울시에 파견키로한 약속이 사실상 무산되었고, DDP·한양도성전시관 등 최근 우리시의 건립 사례에서 살필 수 있듯이 과학관은 관련 전시전문가(기관)에 의해 설계·설치 추진되어야 할 것이나 우리본부에는 전문가가 전무한 바, 현재 귀 부서에서 추진 중인 관장 등 단계별 과학관 운영조직 구성작업이 이루어지면 전문인력에 의해 실시설계·설치 및 전시 등 일괄 추진하여 서울시 최초로 건립되는 과학관이 시민들에게 자랑스러운 명품과학관으로 탄생될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
지방시설사무관대우	윤승근		환경시설과장	신명승		건축부장	09/02 代강성욱
협조자
시행	건축부-10742	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길15 서문별관2동 2층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2474	/전송	3708-2489	/		/	대시민공개