투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	교량보수과장
(경유)
제목	용역계약변경체결통보(마들지하차도외 3개소 보수 및 포장개량공사 실시설계(교통소통대책)용역)

1. 교량보수과-6125(2014.09.01.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업에 대하여 아래와 같이 변경계약체결되었으니 참고하시기 바라며, 아울러 준공기한내 준공신고를 제출토록 하여 지연배상금이 부과되는 일이 없도록 업체에 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 마들지하차도외 3개소 보수 및 포장개량공사 실시설계
(교통소통대책)용역

나. 계약업체 : ㈜태조엔지니어링, 대표 : 한명식

다. 변경계약체결일 : 2014. 09. 02.

라. 변경사항

계약금액	당 초	금42,479,000원
	변경후	금42,479,000원
	증․감액	-
계약기간변경	당 초	2014.05.02. ～ 2014.09.05.
	변경후	2014.05.02. ～ 2014.10.19.
비 고	계약기간 변동

붙 임 : 계약서 1부.  끝.

	관리단속과장
주무관	박경우		관리단속과장	09/02 정수현
협조자
시행	관리단속과-11374	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동 365-1	/	ush.seoul.go.kr
전화		/전송	02-945-5071	/		/	대시민공개