문서번호	시설보수과-3418
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
이경수		박춘배	09/02 정진오
협조
	주무관		임승민

자체(외부전문가 합동) 정밀점검 시행결과 보고

[능산지하차도, 면목교, 중랑교지하차도]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

자체 정밀점검 시행결과 보고

[능산지하차도, 면목교, 중랑교지하차도]

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 준하여 실시토록 되어 있는 정밀점검을 기술용역 타당성심사 결과 외부전문가를 활용한 자체 점검으로 시행토록 통보됨에 따라 내부 계획에 의거 정밀점검을 시행하고 그 결과에 대한 보고임

점검대상 시설물 및 참여 외부전문가

시설물명	시 설 규 모	점검기간	담당자 (정.부)	참여기술자	비고
능산지하차도	B=15.0m, L=380.0m	2014.04.01 ~2014.08.31	이경수 임승민	이제영 어의선 김기호
면목교	B=26.0m, L=72.0m
중랑교지하차도	B=20.0m, L=320.0m

추진사항

❍ 2014.04.01 : 자체 정밀점검 착수(참여기술자 현장투입)

❍ 2014.05.28 : 합동점검 시행(담당자 2명, 참여기술자 3명)

❍ 2014.08.14 : 자문회의 개최(자문위원 5명)

❍ 2014.08.29 : 보고서 제출

정밀점검 시행결과(자문회의 포함)

❍ 시설물 점검이력 및 보수.보강이력 관리는 보고서에 수록

❍ 능산지하차도 콘크리트 연석은 염화칼슘, 건조수축, 외부충격 등으로 손상됨에 따라 단면복구 방안 제시

❍ 면목교 바닥판 하면은 주기적인 점검을 통해 하자담보 기간 완료 전에 일괄 보수 실시 제안

❍ 중랑교지하차도 BOX구간 슬래브는 주기적인 점검 및 관찰 후 손상 확대시 일괄보수 방안 제시

❍ 개략공사비는 부대시설 및 제경비 포함 산정할 필요

❍ 배수구 막힘 등 조치 가능한 사항은 즉시 조치(작업반 투입 수시 조치)

❍ 비파괴시험, 탄산화, 콘크리트 강도 등 현장조사 결과를 전차와 비교 평가

❍ 보수.보강 공사비 산정

(단위 : 천원)

시설물명	총 공사비	1순위	2순위	3순위	비고
능산지하차도	58,050	15,500	5,660	36,890	B등급
면목교	26,880	7,320	17,100	2,460	B등급
중랑교지하차도	92,670	6,140	85,610	920	B등급

조치 및 향후 계획

❍ 점검결과에 대한 조치방안 강구 및 검토 반영

❍ 점검(자문회의 포함)에서 제시된 보수.보강공사는 일상유지 보수업체로 하여금 공사토록 조치(우선 순위에 따라 순차적 보수·보강)

❍ 도로관리시스템 및 시설물정보관리종합시스템(fms) 정밀점검내역 입력

❍ 참여기술자 인건비(점검수당) 및 인쇄비 등 지급(7개조 일괄 지급)

붙임  시설물별 보수·보강물량 각 1부.  끝.