투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	영등포구청장(도로과장)
(경유)
제목	교통시설물 원인자부담공사 준공기한연기 승인통보(노면표시공사)

1. 영등포구 도로과13653(2014.09.01.)호 및 서울경찰청 교통관리과-21270 (2014. 07.31.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련으로 도림로확장공사의 교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 승인 요청건에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다

가. 공 사 명 : 도림로확장공사(2014) 노면표시공사

나. 위    치 : 신길동 373-1 ~ 355-677

다. 공사현황

구 분	공사내용	설 계 자	감 리 사	시 공 사
노면표시공사	노면표시도색 및 제거 1식	대영유비텍㈜	㈜ 한국전설 엔지니어링	㈜ 케이로드

라. 준공기한 : 당초 2014.09.30. → 변경 2014.12.31

마. 연기사유 : 사업구간 추가에 따른 횡단보도 연장 및 차로재구획.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정규용		도로보수과장	09/02 김승태
협조자
시행	도로보수과-4891	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711)	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개