문서번호	기전과-6234
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
이광만		최주용	09/02 정진오
협조	주무관		채희준
	주무관		신대중

2014년 기전시설물 일상유지 보수공사(연)

기성(1회)준공 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

성동도로사업소

(기전과)

기전시설물 일상유지보수공사(연) 기성(1회)준공 보고

▢ 공사개요

◦ 공 사 명 : 2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

◦ 계 약 자 : 기림전력(주) 장일성

◦ 공사기간 : 2014. 3. 10 ~ 2015. 2. 28

◦ 공사금액 : 금131,570,900원

▢ 기성내역

◦ 공 사 착 공 일 자 : 2014.  3. 10.
◦ 부 분 준 공 일 자 : 2014.  9.  1.
◦ 준 공 검 사 일 자 : 2014.  9.  2.
◦ 현  공  정  율 : 85 %
◦ 기성부분준공금액 : 금83,770,000원
◦ 누 계 기 성 율 : 63.6 %

▢ 준공검사자

◦ 성동도로사업소 기전과 채 희 준

◦ 성동도로사업소 기전과 신 대 중

▢ 특기사항

◦ 금번 기성준공분은 계약금액(131,570,900원)대비 63.6%로서 현재 2차 작업지시중이나 1회기성은 1차 작업지시 작업완료분만 기성처리함

◦ 예비준공검사시 작업지시분에 대한 사전검사 필하였음

첨부 : 1. 예비준공검사 조서 1부.

2. 1차작업 완료보고서 1부.

3. 기성내역서(1회) 1부.

4. 사진대지(기성1회) 1부. 끝.