투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 여의도공원 질서유지용역 설계변경 시행

1. 여의도공원관리사무소-6018(2014.9.1)호와 관련입니다.

2.  2014년 여의도공원 질서유지관리 용역에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 여의도공원 질서유지용역

나. 계약기간 : 2014. 3. 1. ~ 2015. 2. 28. (12개월)

다. 계 약 자 : ㈜이노씨엘 (대표 고옥자)

라. 설계변경 내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
계약금액	130,843천원	137,688천원	증 6,845천원
계약기간	2014.3.1~2015.2.28	2014.3.1.~2015.2.28	변경 없음
근무인원	주간 138명 야간 1,103명	주간 211명 야간 1,103명	주간 73명증원

마. 설계변경사유

- 가을철 성수기에 개최예정인 대규모 문화(집회)개최시 이동상인, 노점상 등 공원 질서유지를 위한 근무자 증원배치 필요

- 추석(5일연휴) 및 개천절(3일 연휴), 한글날(징검다리 3일연휴) 등 연휴시 공원을 찾는 시민들의 안전을 위해 근무자 증원배치 필요

사. 추가 소요예산

- 예산금액 : 6,845천원

- 예산과목 : 서부공원녹지사업소운영, 여의도공원유지관리, 일반운영비,

공공운영비(여의도공원 질서유지용역)201-02

※ 예산집행잔액 활용

붙 임 : 1. 2014년 질서유지용역 과업 변경 방침서 1부

2. 2014년 질서유지용역 과업지시서 1부

3. 2014년 질서유지관리 설계 변경내역서 1부. 끝.

주무관	우장명		운영팀장	김한수		주무관	이수환		총무팀장	代이수환
여의도공원관리사무소장	박원근		서부공원녹지사업소장	09/02 안해칠
협조자
시행	여의도공원관리사무소-6049	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울시 영등포구 여의공원로 68(여의도동 2번지)	/
전화	02-761-4078	/전송	02-786-2599	/	woo6411@seoul.go.kr	/	대시민공개