함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(성북1배수지 급수환경 취약관망 이중화공사)

1. 우리사업소에서 서울특별시시설관리공단에 위탁 감독의뢰하여 시행중인 『성북1배수지 급수환경 취약관망 이중화공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 성북1배수지 급수환경 취약관망 이중화공사

나. 도 급 자 : 덕성환경(주) 대표 마 호 성

다. 공사기간 : 2014. 03. 28. ~ 2014. 09. 03.

라. 설계변경내용 : 물량 증․감 및 신공종 발생

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설및부대비(배급수관환경개선)

구 분	계약금액(당초)	계약금액(변경)	증,감액	비 고
도급비(VAT)포함	129,134,460원	129,000,000원	감)134,460원

붙   임 : 1. 설계변경 심의위원회 결과보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증 자료 1부.  끝.

주무관	이연한		주무관	한상근		시설관리과장	나태산		중부수도사업소장	09/02 代서경만
협조자	주무관	김남구		주무관	은정호
시행	시설관리과-23630	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장충동2가 208-1 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	대시민공개