문서번호	도시철도설비부-8085
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	송변전과장	도시철도설비부장
전계목	김형기	09/02 정찬웅

9호선 연장건설 2단계 전차선공사

준공기한 연기 검토 보고

2014. 9.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 연장건설 2단계 전차선공사

준공기한 연기 검토 보고

우리부에서 시행중인『서울지하철 9호선 연장건설 2단계 전차선공사』건에 대하여 원활한 시운전 시행과 차질없는 개통을 위해 본 공사의 준공기한을 연기코자 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 연장건설(2단계) 전차선공사

○ 계 약 자 : 대성전기공업(주) 외 1개사

○ 계 약 일 : 2012. 12. 27(계약번호 : 1*******00)

○ 계약내용

구 분	계약금액(원)	공 사 기 간	공정율(%)
총 차	3,243,219,444	2013. 1. 15 ~ 2014. 9. 11	99.9
1 차	1,738,000,000	2013. 1. 15 ~ 2014. 1. 14	준공(`14.1.10)
2 차	1,252,856,000	2013. 9. 23 ~ 2014. 9. 11	준공(`14. 8. 7)
3 차	252,363,444	2014. 1. 27 ~ 2014. 9. 11	99.9

□ 검토내용

○ 준공기한 연기 요청내용

구 분	준공기한 연기		비 고
	당 초	변 경
총 차	2013. 1. 15 ~ 2014. 9. 11	2013. 1. 15 ~ 2015. 3. 31	금액 변경없음
3 차	2014. 1. 27 ~ 2014. 9. 11	2014. 1. 27 ~ 2015. 3. 31

○ 연기사유 : 9호선 2단계 개통 일정이 미도래(미확정) 됨에 따라 본 공사의 준공기한을 개통일 이후로 연기

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

□ 조치의견

○ 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준』제13장 공사계약 일반조건(안전행정부예규 74호, `14.2.7), 제8절 제2항(계약기간의 연장) 규정에 의거

○ 9호선 2단계구간의 ▴시운전 및 개통 ▴시설물 인수인계 일정 등을 감안, 본 공사의 준공기한을 2015. 3. 31일까지 연기 조치코자 함.

따로붙임  1) 준공기한 연기 요청원 및 동의서 1부.  끝.