투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 동부도로사업소장
(경유)
제목	교통안전시설 (신호) 원인자 부담공사 3단계 변경 및 공사기간 연기 요청(선사로~고덕지구간 도로확장)

1. 기전과-282호(‘14.1.8.)호 및 교통관리과-20855호(’14.7.28)와 관련입니다.

2.『선사로~고덕지구간 도로확장공사』에 따른 교통안전시설(신호) 원인자부담공사의 3단계 변경 및 공사기간 연기를 아래와 같이 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사 교통안전시설(신호) 원인자부담공사

나. 공사위치 : 강동구 선사로~고덕로 구간

다. 총공사기간 : 2012.01.11. ~ 2014.12.31

- 금회 3단계 : 승인일 ~ 2014.10.10.(※ 2단계 시공완료)

라. 3단계 변경내용

구 분	당 초	변 경	변경사유
공사기간	승인일～2014.7.20	2014.7.21.～2014.10.10	One-Line D/B 신청 및 변경공사 시행
공사내용	동명공원앞 경보신호등 신설	신호기(차/보) 신설

마. 설 계 사 : 드리픽스

바. 감 리 사 : 대영유비텍(주)

사. 시 공 사 : ㈜홍명전기

따로붙임 : 1. 경찰청 심의결과 공문 1부.

2. ‘14년 제8차 교통안전시설 심의결과 1부.

3. 변경승인 요청서류(별도송부) 각1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박태욱		환경설비과장	이달영		설비부장	09/03 박기형
협조자
시행	설비부-9790	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 시설국 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개