함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	물품(1취수장 취수펌프 기동반(콘덴서반) 제조구매 설치) 납품기한 연기

우리 센터에서 계약(계약번호 2014080929400) 시행중인 『1취수장 기동반(콘덴서반)제조구매 설치』건에 대하여 아래와 같이 물품 납품기한을 연기코자 합니다.

가) 건 명 : 1취수장 기동반(콘덴서반) 제조구매 설치

나) 계약일자 : 2014. 8. 11

다) 계약상대 : (주)베스텍  대표 : 장세용

라) 납품기한 변경(연기)

- 당초 : 2014. 9. 10

- 변경 : 2014. 10. 31

마) 계약금액 : 금41,701,420원(변경 없음)

바) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1) 방침서 1부.

2) 합의서 1부. 끝.

주무관	김희수		정수시설과장	남효돈		소장	09/03 유성종
협조자	주무관	변민용		행정관리과장	손수곤
시행	정수시설과-2472	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개