투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연기에 따른 협조 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리본부와 귀 사간에 계약하여 시행중인 「탄천변 동측도로 확장 실시설계 용역」건의 준공기한을 아래와 같이 연기코자 하오니, 변경계약 등 조치하여 주시고,

3. 우리시(도로계획과)에서 사업구간에 대한 노선계획을 검토(민원 해결방안, 사업비산출 및 경제성 분석 등)하는데 적극 협조하여 주시기 바라며, 실시설계 과업수행은 노선계획(안) 확정이후 추진할 예정이오니, 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

- 당초 준공기한 : 2014.10.31.

- 연기 준공기한 : 2015.10.31.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					(주)동일기술공사 대표 귀하,(주)수성엔지니어링 대표 귀하
주무관							강철규			토목설계과장					조성만					토목부장					09/03 노우성
협조자
시행			토목부-17184									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-2587						/전송			3708-2599					/	rkd6139@seoul.go.kr												/	대시민공개