투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연기의뢰

우리부에서 시행중인 「탄천변 동측도로 확장공사 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 준공연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

- 용 역 명 : 탄천변 동측도로 확장공사 실시설계 용역(2차분)

- 용역기간 : 2010. 3. 3. ~ 2014.10.31.

- 도 급 비 : 2,421,000,000원

- 용 역 사 : ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링

나. 준공기한 연기

- 당초 : 2010. 3. 3. ~ 2014.10.31.

- 변경 : 2010. 3. 3. ~ 2015.10.31.

다. 연기사유 : 붙임 참조

붙임 : 1. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

2. 설계용역 준공기한 연기보고서 1부.  끝.

							토목부장
주무관							강철규			토목설계과장					조성만					토목부장					09/03 노우성
협조자
시행			토목부-17183									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-2587						/전송			3708-2599					/	rkd6139@seoul.go.kr												/	대시민공개