문서번호	도시철도토목부-9759
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
문병종		윤방식	09/04 이은상
협조

‘14년도 예산배정 조정에 따른 계약금액 검토보고

(9호선3단계 918공구 건설공사)

2014. 09.

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

‘14년도 예산배정 조정에 따른 계약금액 검토보고

(9호선3단계 918공구 건설공사)

‘14년도 예산배정 조정으로인한 9호선3단계 918공구 건설공사 6차 계약금액 및 물량 조정 검토 보고임

도시철도토목부-8316호(‘14.07.29)와 관련 임.

□ 사업개요

◦ 공 사 명 : 지하철9호선3단계918공구 건설공사

◦ 공사규모 : 총연장 1,290.7m(본선 1,125.7m, 정거장 1개소 165m)

◦ 도 급 비 : 137,677백만원(6차 28,600백만원)

◦ 시 공 자 : SK건설(주)외 4개사

◦ 감 리 사 : ㈜서영엔지니어링외 3개사

◦ 공사기간

- 총괄 : 2010.02.19 ~ 2016.02.17(변경없음)

- 6 차 : 2014.01.27 ~ 2015.01.31(변경없음)

□ 계약금액 조정사유

○ ‘14년도 예산배정조정금액 6차 도급내역반영(증 3,380백만원)

(도시철도토목부-8316호 ’14.07.29)

□ 공사 계약 현황

구 분	총괄	기준공(1~5차)	6차	잔여	비고
공사금액	140,389백만원	47,016백만원	28,600백만원	64,773백만원
공사기간	‘10.02.19 ~ ’16.02.17	‘10.02.19 ~ ’14.01.20	’14.01.27 ~ ‘15.01.31	’15.02.01 ~ ’16.02.17

□ 계약금액 조정내용

(단위:천원)

구 분	당 초 계약금액	변 경 계약금액	증 (감)	비 고
총 괄	140,388,819	140,388,819	-
6 차	28,600,000	31,980,000	3,380,000	- 물가변동분(1~4회)반영 ‘14년도 예산변경 조정액 반영 공사구간 및 물량 변경

□ 주요 공종 변경내역

작업구간	공 종	당초(m)	변경(m)	증(감)	비고
본선1터널	상반굴착	150	206	66
	하반굴착	200	326	126
931정거장	중간슬래브	210	140	(감70)
	지하1층벽체	65	140	75
	상부슬래브	35	30	(감5)
931E1환기구	중간슬래브	28	0	(감28)

□ 조치계획

◦ 상기 검토내용과 같이 ‘14년도 예산조정으로 증액된 3,380백만원을   총사업비와 6차 공사기간 변경없이 6차공사 계약금액을 증액 반영하고,

◦ 현재 진행중인 6차 공사는 책임감리원의 검토의견과 같이 계약된 물량을 조정하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 1. ‘14년도 예산조정 보고서 1부.

2. 책임감리원의 계약금액 조정요청서 1부.

3. 변경설계 내역서(6차2회)1부.

4. 공사추진 현황도 1부. 끝.