문서번호	환경과-6321
결재일자	2014.9.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	운영부장
윤석경		이철범	09/04 송대식
협조

부상화장실 제작설치 설계변경 시행 보고

2014. 9

한강사업본부

환경과

부상화장실 제작설치 설계변경 시행

한강공원 부상화장실 설치사업을 시행하는 중 지역여건에 맞게 화장실 지주 및 진입시설을 변경하고, 설계보다 우수한 자재사용을 위한 설계 변경 신청건을 검토한 바, 타당하여 처리코자 함.

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 부상형화장실 8개소 설치

❍ 설치장소 : 반포(3), 강서(3), 망원(2)

❍ 설치기간 : 2014. 7. 4 ~ 2015. 4. 16

❍ 설치금액 : 1,141,180천원

❍ 설치업체 : 진성모바일 (대표 양병준)

□ 추진경위

❍ 예산편성 : 1,500백만원(‘13.12)

❍ 방침수립(‘14.1.16)

❍ 설계 및 전문가 의견수렴(‘14.1.24~4.5)

❍ 계약심사(‘14.4.21~5.1)

❍ 일반입찰 발주(‘14.5.7)

❍ 공고기간(‘14.5.14.~5.22)

❍ 업체선정 및 계약-진성모바일(‘14.6.20)

❍ 화장실 제작 설치(‘14.7.4 ~ )

□ 설계변경 주요내용 및 검토 (세부 검토사항 – 별첨)

❍ 화장실 : 프레임, 바닥타일, 실내·지붕재질 변경

➞ 강도가 강한 재질을 사용하여 내구성을 향상시킴

❍ 부유시설 : 점검구 수량 조정(18개 ➡9개)

➞ 부상시설 내부를 점검하는 기능으로 2개당 1개 맨홀로 점검가능

❍ 진입슬러프 위치 변경(강서 매점 옆) : 전면으로 배치

➞ 매점 주변 지형여건으로 진입시설을 전면으로 배치하여도 이용에 불편이 되지 않음

❍ 고정 지주(반포3개소) : 1단 ➡ 2단

➞ 저지대인 반포지역의 고정지주는 9m로 미관을 고려하여 변경

□ 검토 의견

❍ 저지대인 반포지역 고정지주를 안테나식으로 변경하여 미관을 단장하고

❍ 강서지역 매점주변의 지역여건상 진입시설을 앞쪽으로 배치하며

❍ 내․외부 재질변경하여 강도를 보강하는 등

❍ 수량, 금액변경없는 사항으로 승인하고, 향후 설치감독에 철저를 기하고자 함

첨 부 : 변경내역서 1부. 끝.