문서번호	조경지원과-9749
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장	동부공원녹지사업소장
채해바래		김제중	09/04 이춘희
협 조
	주무관			김덕수
	주무관			박종천

<천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사> 관급자재 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9

동부공원녹지사업소

조경지원과

「천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사」

관급자재변경검토보고

「천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사」관련 족구장 주변 휀스에 대해서 높이 조정 및 출입문 추가 설치 민원이 있는 바, 관급자재를 변경 구매하고자 검토 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사

공사기간 : 2014. 7. 28 ~ 2014. 9.25

계약금액 : 금96,052,000원(금구천육백오만이천원)

도 급 자 : 성보종합조경(주) 대표 정구헌

주요공종

- 시설물공 : 대나무울타리 460m 설치, 전기온풍기 4대 교체 등

- 식 재 공 : 영산홍 등 3종 4,000주

- 철 거 공 : 대나물울타리 등 철거

관급자재

- 메시형울타리 16경간, 이동식 초소 1개소, 운동시설 4개소

Ⅱ		관급자재 변경내역

변경사유

- 족구장 회원들과 족구장 휀스 협의 중에 설계에 반영된 울타리 높이

(4m → 5m) 조정 및 출입문 추가 민원 요청에 따라 울타리 높이를 5m 조정 및 출입문을 추가로 설치

‧ 메시형휀스(W4000*H4000) 16경간

→ 메시형휀스(W4000*H5000) 15경간, 출입문 1개소 추가

관급자재비 변경내역

- 당초 : 8,364,920원

- 변경 : 9,698,680원

- 증액 : 1,333,760원

(단위 : 원)

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	조달수수료	합계	증액
당초	메시형 울타리	W4000 *H4000	경간	16	520,000	8,320,000	44,920	8,364,920	1,333,760
변경	소계					9,646,600	52,080	9,698,680
	메시형 울타리	W4000 *H5000	경간	15	616,000	9,240,000	49,890	9,289,890
	출입문	W1000 *H2000	개소	1	406,600	406,600	2,190	408,790

Ⅲ		예산확보방안	: 낙찰차액 사용

예산내역

(단위 : 원)

사업명	발주금액	도급액	낙찰차액	비고
천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사	107,876,800	96,052,000	11,824,800 (사용액 : 1,333,760)

Ⅳ		조치계획

관급자재 변경에 증가되는 금액에 대하여는 집행잔액(낙찰차액)을 사용하고 변경사항에 대하여는 계약업체에 우선 변경 계약토록 통보

붙  임 : 현황사진 1부.

현 황 사 진

○ 메시형울타리

(당초)

(변경)

○ 출입문