문서번호	급수운영과-18036
결재일자	2014.9.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최용진	代김남구	전결 09/04 김영삼
협 조

계약도서 검토보고

(2014년 중구,용산구 관내 시설물설치 및 소화전공사)

2014.09.

공사감독2처-14793(2014.09.02.)호로 보고된 “2014년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사”의 계약도서 오류 적용에 대하여 보고 합니다.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사

나. 공사기간 : 2014.6.9. ~ 2015.5.31

다. 공 사 비 : 574,530,900원

라. 공사개요 : 노후밸브교체 109개소, 밸브실정비 196개소 등

마. 계 약 자 : (유)성림건설  대표 이정근

2. 검토내용

◎ 계약도서 오류 적용 여부

- 낙찰율 오류 적용

· 시설관리공단에서 감리하고 있는 “ 2014년 중구,용산구 관내 상수도시설물설치           및 소화전공사”에 대하여 설계변경코자 계약내역서 검토한바 당해 공사의 낙찰           율은 86.49% 인데 계약체결시 내역서의 공정별 낙찰율을 95% 적용 및 제경비가            임의 조정되어 계약체결 되었으로 공정별 단가 및 제비율 조정의 필요 여부를             문의한 내용 임.

3. 검토결과 및 조치의견

◎ 실정보고 검토결과 당해 공사는 공사계약 일반조건(Ⅵ.공사설계의 변경 및 Ⅶ.       계약금액 의 조정)에 해당되지 않으므로 설계변경 및 정산 시행시 당초 계약내역       서를 토대로 적용토록 회시코자 합니다.

따로 붙임 : 시설공단 검토보고서 1부.   끝.