투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	‘14년도 예산조정에 따른 계약금액 조정 및 변경계약(918공구 6차2회)의뢰

1. 도시철도토목부-8316호(2014.07.29.) 및 서영감리제2014-704호(2014.09.03.)와

관련입니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사와 관련하여 ‘14년도 예산배정조정에 의한 6차공사의 계약금액 조정 및 변경계약(6차2회)의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

나. 도급자 : SK건설(주) 대표이사 조기행

다. 예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 시설비

다.공사 계약 현황

단위 : 백만원

구 분	총괄	기준공(1~5차)	6차	잔여	비고
공사금액	140,389	47,016	28,600	64,773
공사기간	‘10.02.19 ~ ‘16.02.17	‘10.02.19 ~ ‘14.01.20	‘14.01.27 ~ ‘15.01.31	‘15.02.01 ~ ‘16.02.17	공사기간변경없음

라. 계약금액 조정내용

(단위:천원)

구 분	당 초 계약금액	변 경 계약금액	증 (감)	비 고
총 괄	140,388,819	140,388,819	-
6 차	28,600,000	31,980,000	3,380,000	- 물가변동분(1~4회)반영 ‘14년도 예산변경 조정액 반영 공사구간 및 물량 변경

마. 계약금액 조정 사유 : ‘14년도 예산배정 조정에 따른 계약금액 조정

붙 임 1. ‘14년도 예산배정 조정 보고서 1부.

2. 계약금액 검토 보고서 1부.

3. 계약금액 조정 요청(책임감리원)공문 1부.

4. 계약금액 조정 내역서 1부. 끝.

	도시철도토목부장
주무관	문병종		토목2과장	윤방식		도시철도토목부장	09/04 이은상
협조자	경리과장	최영미		기획예산과장	최갑영
시행	도시철도토목부-9790	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231번지(예장동 산5-85) 서울특별시도시기반시설본부(도시철도토목부)	/
전화	02)772-7214	/전송	02)772-7306	/	bjmum@seoul.go.kr	/	대시민공개