문서번호	토목부-21982
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		최진우	11/29 임춘근
협조
	자전거도로사업팀장		박상위

“청계천~정릉천 자전거도로 연결공사”

시설공사 발주 계획 보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

“청계천~정릉천 자전거도로 연결공사”

시설공사 발주 계획 보고

자전거 이용환경을 안전하고 편리하게 개선하고 청계천을 통한 도심 내 자전거 접근성 향상하기 위한 사업인“청계천~정릉천 자전거도로 연결공사”를 추진코자 공사 발주 계획을 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 정릉천~청계천 자전거도로 연결사업 추진 관련 협조요청 [자전거정책과-11531호('21.11.22.)]

Ⅱ		공 사 개 요

○ 위    치 : 청계천 및 정릉천 합류부(고산자교~신답철교~중랑천 합류부)

○ 규    모 : 자전거도로 교량 신설(L=30m, B=5.4m),

자전거도로 신설(L=645m), 자전거도로 정비(L=2,300m)

○ 사업기간 : 2020. 12. ∼ 2022. 12.

○ 총사업비 : 2,173백만원(도급비 1,259, 관급비 537, 폐기물 65, 감리비 310)

○ 위 치 도

Ⅲ		추 진 경 위

○ '20.08.13. : 성북천, 정릉천 자전거도로연결 추진계획 방침 수립

○ '20.12.07. : 기본 및 실시설계 시행(~'21.12.)

○ '21.05.18. : 청계천 시민위원회 자문

○ '21.09.24. : 지역수자원관리위원회 소위원회 심의

○ '21.10.30. : 특정기술선정 심사위원회 개최

○ '21.11.19. : 계약심사 의뢰

○ '21.12.    : 공사 발주

Ⅳ		발주방법 검토

○ 투입 예산 현황

예 산 과 목 (자전거정책과)
정책	단위	세부	편성목	통계목	금 액
자전거이용 활성화 및 교통환경개선	자전거 이용시설 확충 및 관리 (교통사업특별회계)	도심연계 자전거 전용도로망 구축	시설비및부대비	시설비	889백만원
				감리비	25백만원
		자전거도로 안전시설 확충	시설비및부대비	시설비	1,259백만원

※ 2021년 2,173백만원(단년도사업)

○ 시설공사 발주계획(********)

- 공사기간 : *****************

- 입찰참가자격

1) ****************************************************************************************

2) ***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

3) ********************************************************************************************************

- *****************************************

○ 감리용역 발주계획(추정가격 : 3.1억원)

- 용역기간 : **********

- 감독업무 추진방안

․ ********************************************************

․ ****************************************************************************************************

․ **********************************************************************************************************************************************

○ 건설폐기물처리용역 발주계획************

- 용역기간 : **********

- 발주방법 : *****************************

- 입찰참가자격

***********************************************************************************************

**************************************************************************************************************

*********************************************************

*******************************************************************************************************

Ⅵ		향 후 계 획

○ 2021.12. : 공사 발주

○ 2021.12. : 계약 및 착공

○ 2022.12. : 공사 준공

붙임 1. 관련 방침서 1부.

2. 설계내역서(공사, 폐기물) 1부.  끝.