문서번호	정수시설과-9162
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
신왕근		11/29 代고명규
협 조

『광암정수센터 약품투입동 노후 시설물 보수공사』

설계변경 심의결과 보고

2021. 11.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『광암정수센터 약품투입동 노후 시설물 보수공사』

설계변경 심의결과 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 “광암정수센터 약품투입동 노후 시설물 보수공사” 의 설계변경 자체 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 광암정수센터 약품투입동 노후 시설물 보수공사

❍ 계약기간 : 2021. 7. 23. ~ 2021. 11. 30.

❍ 계 약 자 : 우일디앤씨㈜ 대표 이호성

*************************

Ⅱ		심의위원회 개요

❍ 일  시 : 2021. 11. 29.(월) 09:00

❍ 구  성

- 위원장(1) : 정수시설과장

- 위  원(3) : 전기6급 지동성, 전기6급 이민화, 시설8급 성민제

❍ 안  건

- 현장여건에 의한 신규공종 추가 및 공종별 물량변경에 따른 설계변경의 적정성

- 제경비(보험료 등) 정산 및 제비율 요율 산정의 적정성 등

Ⅲ		심의 내용 및 결과

❍ 심의 내용

- 현장여건에 따른 공사내용의 적정성 여부

- 공종별 물량변경 및 신규공종 추가에 따른 설계변경의 적정성 여부

- 제경비 정산 및 제비율 요율 산정의 적정성 여부 등

❍ 심의 결과 : 적정함

- 현장여건에 의한 신규공정 추가 및 공종별 물량변경, 제경비 정산 등에 따른 설계변경이 적정하게 반영되었음

Ⅳ		계약금액 변경 내역

(단위 : 원)

**	**	**	**
***	**********	**********	********
****	**********	*********	********
계	**********	**********	********

※ 세부변경 사항 : 따로붙임(설계변경 내역서) - 제경비 포함

Ⅴ		조치 계획

❍「광암정수센터 약품투입동 노후 시설물 보수공사」의 현장 여건에 따른 설계변경(신규공종 추가 및 공종별 물량변경, 제경비 정산 등)에 대하여 심의위원회 심의결과에 따라 시행코자 함.

따로붙임 : 1. 설계변경 심의 결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액 조정 검증확인서 1부. 끝.