문서번호	시설관리과-19481
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박홍		김진성	11/29 김근태
협 조

설계변경(2차) 심의결과 보고 (2021년 서초·강남구 관내 긴급누수복구공사)

2021년 11월

강남수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의결과 보고(2차)

심의 의원회 의견

○  공 사 명: 2021년 서초 ·강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 심의일시: 2021.  11. 29 (월) 10:30~11 :00

○ 심의장소: 강남수도사업소 4층(시설관리과)

○ 심의의견: 설계변경(2차) 심의 의견을 아래와 같이 제시함.

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
위원장	시설관리과장	물량변동 적정성	***************	**
		신규공정 단가산정	*********
		제경비 적정산정	******
위 원	급수운영과 시설6급	물량변동 적정성	*********	**
		신규공정 단가산정	*********
		제경비 적정산정	******
위 원	급수운영과 시설6급	물량변동 적정성	***************	**
		신규공정 단가산정	****
		제경비 적정산정	***********
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	***************	**
		신규공정 단가산정	*********
		제경비 적정산정	*******
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	***********	**
		신규공정 단가산정	*********
		제경비 적정산정	********

신청부서명	시설관리과
작 성 자	박 홍
제출년월일	2021. 11.29

설계변경 사유서(2차)

□  공사 현황

□ 공 사 명: 2021년 서초․강남구 관내 긴급누수복구공사

(장기계속단가계약)

*************

- 누수복구: **********************

- 불용관 및 인입관정비: ******************

**************************************

****************금*************

*******************************

□  설계변경 사유

❍ 시공물량 증․감에 따른 계약물량 조정

****************************************************************************************************************

- 시공물량 공종별 증․감 현황

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************    ❍ 신규 공종 발생

**************************************************************************

❍ 사급자재 물량 변경

************************************************************************

□  설계변경 내역

(단위 : 원)

************************************************************************************************************************************************************

□  조치계획

❍ 상기와 같이 ********************으로  변동없으며,설계변경 (2차) 심의 시 설계사유(물량증․감 및 신규공종 등)에 대해 검토한 결과 물량산출 및 낙찰율 등을 적정하게 적용하여 설계변경(2차) 심의 결과에 의거 설계변경 시행코자 함.

붙임: 1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 심의의견서 1부.  끝.