투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차4회·4차1회) 및 준공기한 연기 의뢰(중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사)

우리부에서 시행 중인「중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차4회· 4차1회) 및 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사

2. 계약금액 : 24,345,585,000원(4차 2,245,497,000원)

3. 공사기간 : 2019.05.27. ~ 2022.08.09.(4차 2021.03.02. ~ 2021.12.31.)

4. 계 약 자 : (유)동경건설 외 2개사(대표 백영선)

5. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	비 고
계약금액	총차	24,345,585,000원	24,629,550,000원	증 283,965,000원
	4차	2,245,497,000원	3,108,512,000원	증 863,015,000원

- 변경사유 : (총차) 기 실정보고 승인사항 등 반영

(7차) 총차 물량 내 차수 물량 조정

6. 준공기한 연기

구 분		당 초	변 경	비 고
공사 기간	총차	2019.05.27.~2022.08.09.	2019.05.27.~2022.08.09.	변경 없음
	4차	2021.03.02. ~ 2021.12.31.	2021.03.02. ~ 2022.05.17.	증 137일

- 연기사유 : 붙임문서 참조

7. 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 중랑천 마스터플랜 단기사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 및 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	송민섭		치수시설과장	代이병환		방재시설부장	11/29 박홍봉
협조자	주무관	이병환
시행	방재시설부-15110	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8772	/전송		/	sms2002@seoul.go.kr	/	부분공개(7)