문서번호	하천관리과-15783
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하천생태팀장	하천관리과장
강신현		이한복	11/29 손경철
협조

2021 지방하천 제방

정밀점검용역 준공기한 연기 검토보고

2021. 11.

물순환안전국

(하천관리과)

2021 지방하천 제방 정밀점검 용역

준공기한 연기 검토보고

「2021 지방하천 제방 정밀점검 용역」에 대하여 내실있는 과업수행을 위한 준공기한 연장 검토 내용을 보고드림

		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 2021 지방하천 제방 정밀점검용역

□ 용역기간 : 2021. 3. 30. ~ 11. 30.

□ 용 역 비 : ********

□ 용 역 사 : ***********

구 분	개 소	연장(km)	해 당 하 천 명
계	28	199
강북하천	15	111.5	홍제천, 향동천, 창릉천, 청계천, 도봉천, 방학천, 당현천, 우이천, 묵동천, 전농천, 성북천, 정릉천, 불광천, 가오천, 대동천
강남하천	13	87.6	반포천, 성내천, 도림천, 시흥천, 사당천, 세곡천, 오류천, 여의천, 감이천, 탄천, 양재천, 고덕천, 대사골천

□ 용역대상

		추 진 경 위

□ ’21. 3. 30. : 제방 정밀점검용역 계약

□ ’21. 5. 20. : 제방 정밀점검용역 착수보고회

□ ’21. 5. ~ 6. : 점검현장 답사

※ 25개 자치구에 용역 중점사항 공유 및 협조 요청

□ ’21. 7. ~ 8. :  1차 현장조사 실시

□ ’21. 10. 12. :  1차 자문회의 및 중간보고회

□ ’21. 11. ~ : 2차 현장조사 실시

		준공기한 연기 검토

□ 변경내용

과 업 기 간		비 고
당 초	변 경
’21. 3. 30. ~ 21. 11. 30.	21. 3. 30. ~ 21. 12. 30.	용역비 변동없음

□ 연기 사유

- 내실있는 과업 수행을 위해서는 1차 자문회의 결과를 반영하여 충분한 현장 조사, 구청 등 관련부서와의 협업이 필요하나 코로나 19 발생으로 인한 과업기간 부족으로 준공기한 연기

□ 귀책사유: 서울특별시

□ 지체상금: 미부과

		향 후 계 획

□ ’21.11. 29. : 용역기간 변경 계약의뢰(재무과)

□ ’21.12월 중 : 2차 전문가 자문 및 최종보고회

□ ’21.12. 30. : 용역 준공

붙  임: 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.