문서번호	정수시설과-2045
보존기간	년
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김달회		박심근	09/04 오세영
협 조
	정수과장			이태일

재건설 및 고도정수처리시설공사 관련

공정회의 개최결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

재건설 및 고도정수처리시설공사 관련

공정회의 개최결과

재건설 및 고도정수처리시설공사 추진과 관련하여 9월 첫째주 공정회의 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

❍ 일  시 : 2014. 9. 3(수) 14:00~15:40(1시간 40분),

❍ 장  소 : 시공사 상황실

❍ 참석자 : 21명

- 본부(1명) : 고도정수반 이재학

- 정수센터(9명) : 정수과장, 정수시설과장, 윤현진, 정희중, 김성재,                          경규선, 이정원, 이무규, 김달회

- CM 단(5명), 대우현장(6명)

❍ 회의안건

- 재건설공사 관련 시설물 개선 요구사항 검토

□ 회의 결과

❍ 재건설공사 관련 시설물 개선요구사항(세부내역 별첨 참조)

- 시설물 개선 요구사항 추진현황

구분	요청건수 (건)	조치완료 (건)	조치중(건) (진행 및 검토)	비고
계	296	149	146	1건 수용불가
2013. 9. 11～7. 16	259	148	111	-
2014. 9. 33(금회)	37	1	35	1건 수용불가

※ 소독공정분야 기 요구한 3건에 대해 추진사항 확인

- 수용불가 1건은 여과지 밸브 조작대 볼트캡 요청건으로 옥외만          적용함으로 여과지는 옥내로 제외

❍ 추가 요청 및 협의사항

- 오존접촉조 유입전에 1정수장 및 2정수장 통합여과수의 혼합 및        정수지 잔류염소 운영문제

• 혼합없이 오존접촉조 각계열로 유입시 유량급변으로 오존제어          어려움 예상됨, 시운전시 고려요함 → 별도 논의

- 본관 관리동 근무 관련 직원 불편사항에 대해 본부에서 직원들의 후생복지 차원에서 조치

• 중앙제어실, 대기실, 화장실, 샤워실, 체력단련실 등

- 야간 출․ 퇴근 및 정수장 순찰시 도로가 어두워 야간 안전사고 우려가 있으므로 보안등 설치

- 옥상 피뢰도선 조속 설치하여 낙뢰 대비

- 송수펌프동 전기실 바닥 악세스플로아 교체 및 청소 조속실시

- 중앙제어실 천장 마무리

- 사무실 전등수가 너무 많으므로 라인별로 점, 소등 방안 강구

『 회의 전경 』

따로붙임 : 시설물 보완 및 개선요구 사항 및 처리(조치) 현황  1부. 끝.