투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 계약 의뢰(신상도 지하차도 확장공사)

우리부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사」와 관련하여 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 신상도 지하차도 확장공사

2. 계약금액 : 18,929,900,000원 (9차 7,520,621,000원)

3. 공사기간 : 2007.12.31. ~ 2021.12.31.(9차 2021.8.25. ~ 2021.12.31.)

4. 계 약 자 : (유)한백종합건설 외 1개사(대표 이진일)

5. 준공기한 연기내용(※ 계약금액 변경 없음)

구 분		당 초	변 경	비 고
공사 기간	총차	2007.12.31.~2021.12.31.	2007.12.31.~2022.4.30.	증 4개월
	9차	2021.8.25. ~ 2021.12.31.	2021.8.25. ~ 2022.4.30.	증 4개월

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	김태중		방재시설부장	11/29 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-15062	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)