문서번호	토목부-17434
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
이석근	조성만	노우성		09/05 이광세
협 조

고지수로 정밀안전진단 추진 및 설계변경 실정보고

[디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계]

2014. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

고지수로 정밀안전진단 추진 및 설계변경 실정보고

[디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계]

우리본부에서 시행중인 「디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시

설계」와 관련하여 사업에 저촉되는 노후 고지수로에 대한 정밀안전진단

추진계획 보고임.

용역개요

용역명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계

위  치 : 금천구 가산동 319-10~독산1동 998-10

규  모 : 도로개설 B=8.7~12m, L=452m (지하차도 290m)

용역비 : 769,933,000원

기  간 : 2013. 5.24 ~ 2014. 10.31

계약자 : ㈜유신, ㈜동일기술공사, ㈜일신이앤씨

고지수로 조사현황

2014. 1.22 : 실시설계 추진요청(실 인수인계 3월초)

2014. 6. 4 ∼ 6. 9 : 사업구간 GPR 탐사 및 지하매설물 확인 줄파기

2014. 7.18 : 고지수로 현황 조사요청(본부→금천구청)

2014. 7.21 : 철도하부 저촉구간 고지수로 내부 조사

2014. 7.22 : 고지수로 확인결과 통보(본부→금천구청)

2014. 8.19~20  : 고지수로 관련 합동회의(오봉수의원,물관리국,도로계획과,구청)

2014. 8.28  : 고지수로 현황보고(시설국장)

고지수로 조사결과

〈 평 면 도 〉

〈 고지수로 매설 조사 현황〉

기본설계	실시설계
고지수로

고지수로 현황

본 고지수로에 대한 기초자료가 전무한 상태(제원 및 시공년도 등)이며,  인근 건물관리자(다함이텍) 탐문에 의하면 1970년도경 설치된 것으로    추정(약 40여년 경과)되는 노후 시설로 내부 확인결과 부분적으로 보강한 사실이 확인되었음.

경부선 철도선로를 횡단하는 고지수로의 상부슬라브가 철도궤도 노반으로 현재 사용되고 있음.

따라서 지하차도 공사를 위해서는 고지수로 하부로 강관압입이 필요하여 상시 운영중(24시간, 유휴 20분)인 경부선의 안전운행을 위한 안정성 검토가 필요함.(슬라브상단과 철도레일과의 높이는 약 69~79cm임)

〈 고지수로 매설 조사 현황〉

종단면도	강관압입 시공단면도

검토의견

철도시설의 안전과 향후 공사의 안전시공을 위해 고지수로에 대하여

정밀안전진단 실시 후 보수보강방안을 검토반영함이 타당하다고 사료됨.

본 사업은 실시설계완료 후 금년도 하반기 공사발주가 불가피한 실정

으로서 정밀안전진단용역으로 별도 발주시 용역기간 추가소요로 과업

추진에 어려움이 있음.

기 배정된 지하매설물 추가조사비 사용 잔액(800만원)을 공제 시 실제

정밀안전진잔에 소요되는 예산은 소액(1,700만원)으로서 사업추진의  효율성 및 예산 절감을 위해 본 과업수행업체(유신, 동일)로 하여금 수행토록 설계변경 시행하고 실비 정산처리코자 합니다.

〈 정밀안전진단 〉

- 구 간 : 철도횡단구간 및 굴곡부 (L=60m)

(2@2.7×3.0×20m, 2@4.1×2.0×40m)

- 조사방법 : 코아채취 10개소, 구조해석, 철근탐사 등

- 소요예산 : 30,000천원 (낙찰율 86.1% 적용시 약 25,000천원)

※ 지하매설물 추가조사비 예산잔액 8,000천원 공제

- 실소요예산 : 17,000천원(25,000,000-8,000,000)

〈 설계변경내역 〉

- 당초 : 768,933천원, - 변경 : 785,933천원, - (증)17,000천원

행정사항

2014. 9. 5. : 예산배정요청(도로계획과)

정밀안전진단 추진에 따른 협의(금천구청,철도공사,물관리국)

2014. 9.15. : 설계변경 및 용역 추진

2014.10.31. : 용역 준공

붙임 : 정밀안전진단용역비 산출내역 1부.  끝.