문서번호	토목부-17412
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	09/05 노우성
협조
	주무관		양준식

가로등 및 투광등 설치 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

도시기반시설본부

토 목 부

가로등 및 투광등 설치 검토 보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

본선 교량 및 주암교 신설을 위한 단계별 교통처리계획에 의거 교통전환된 연결도로의 교통안전 확보와 단계별 도로공사를 위해 가로등 및 투광등 설치에 대한 검토 보고임

관련근거

❍ 서울시지방경찰청 교통관리과-12147호(`14.5.7.)

❍ 동기강 2014-146호(`14.7.4.) 주암교연결도로 임시가로등 설치 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 1개소, 지하차도 3개소)

❍ 공 사 비 : 221,555백만원 (7차: 8,906,500천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(7차 `13.5.9.~`14.9.30.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

검토내용

❍ 수서방향 주암교 신설을 위해서는 단계별 교통처리계획에 따라 교통 및 보행자 안전확보를 위해 가로등 이･신설이 요구됨

❍ 광역상수도 부단수 공사와 본선교량 교각 시공을 위한 도로점용으로 공사용 임시 투광등 설치가 필요함

❍ 위 치 도

❍ 교통처리 단계별 가로등 설치 현황

구 분	공 사 내 용	소요 일수	설치수량		비고
			당초설계	신규반영분
1단계	광역상수도 이설 부단수	30	이설가로등 12주	신설가로등 4주
2단계	광역상수도 이설 부단수	46	-	투광등 10개소
3단계	주암교(수서) 설치	184	이설가로등 3주	-
4단계	본선 교각 P3, P4	46	-	투광등 9개소
5단계	주암교 성토작업	13	-	-

❍ 공사비 증･감 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
1단계	-	8,791	8,791
2단계	-	6,175	6,175
4단계	-	3,100	3,100
임시전력	-	5,081	5,081	추후실정산
제경비	-	2,853	2,853
합 계	-	26,000	26,000
부가세	-	2,600	2,600
총 공 사 비	-	28,600	28,600

조치계획

❍ 임시전력 사용료는 추후 실비정산 처리토록 하고,

❍ 가로등 및 공사용 투광등 신규설치로 증가되는 공사비(28,600천원)는 감리단 검토내용에 의거 추후 설계변경하여 도급비에 반영토록 하고자 함

붙 임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.