다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	舊서울일본인학교 부지 및 시설물 경비용역 계약변경 의뢰

1. 투자유치과-7671호(2014.9.4)호와 관련입니다.

2.「舊서울일본인학교 부지 및 시설물 경비용역」계약과 관련하여, 개포외국인학교 건립 사업 중단 이후 활용방안 결정을 위한 절차가 진행 중임에 따라 아래와 같이 계약을 변경하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 舊서울일본인학교 부지 및 시설물 경비용역

- 용역기간 : 2014. 1. 1 ~ 9. 30

- 계약금액 : 금41,797,350원(금사천일백칠십구만칠천삼백오십원정)

- 용역업체 : 리더스관리㈜

나. 계약변경사항 : 계약 금액 및 계약기간

- 변경사항

변경내용	변경전	변경후	비고
계약금액	금41,797,350원정	55,729,800원	13,932,450원 증액
계약기간	’14. 1. 1 ~’14. 9. 30	’14.1.1~’14.12.31	3개월 연장

- 연장사유 : 개포외국인학교 건립 사업 중단 이후 舊일본인학교부지 활용방안 결정을 위한 절차가 진행중임에 따라 활용방안이 최종 확정될 때까지 연장

- 귀책소재 : 서울시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 1. 개포외국인학교(舊서울일본인학교) 부지 및 시설물 관리용역 계약 변경계획 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 산출내역서 1부.  끝.

	투자유치과장
주무관	김학현		투자관리팀장	장상용		투자유치과장	09/05 김정선
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	투자유치과-7739	(		)	접수		(		)
우	110-750	서울 중구 무교로 21 7층 투자유치과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5358	/전송	02-2133-0706	/	goodnews71@seoul.go.kr	/	부분공개(7)