문서번호	도로보수과-5173
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	도로보수과장
유현선		代김종범	09/05 손수희
협조

밤고개로 배수성아스팔트 포장 검토보고

2014.  9.

동부도로사업소

(도로보수과)

밤고개로 배수성 아스팔트 포장  검토 보고

밤고개로 상에서 시행한 굴착복구공사 구간(수서IC~수서역교차로)에 대해 기존 포장재의 기능 유지를 위해 동일한 포장재(배수성아스팔트) 시공하는 방안을 검토보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 3. ~ 2015. 2. 28.

○ 규    모 : 소규모굴착복구 102a, 차로복구 336a

○ 도 급 비 : 1,625,284천원

○ 도 급 자 : (유)다라니산업건설 대표 최형근

□ 검토배경 및 조치방안 검토

○ 검토배경

- 밤고개로 상에서 「판교~강남 연계 열배관공사」와「전기관로공사」로 시행한 굴착복구공사 구간(수서IC~수서역교차로)은 배수성포장재로 시공된 구간으로 효율적인 도로유지관리를 위해 검토 함

○ 조치방안

- 기 시공된 배수성포장의 기능 유지를 위해서는 동일 포장재(배수성포장)로 시공

- 굴착복구 배수성포장 시공 면적 108.2a

※ 배수성 아스팔트 포장의 구조 : 배수성 포장은 기존 불투수성 기층 위에 공극률이 높은 다공질의 아스팔트 혼합물을 표층에 시공하고, 이 배수성 혼합물 층에 유입된 물이 불투수층 위로 수평 배수되어 기층 이하로는 물이 침투하지 않는 구조임

□ 공사비 검토

○ 공사비 : 증)206백만원

(단위:천원)

구 분		당 초		변 경		증․감
		수량	금액	수량	금액
공종	텍코팅	0	0	108.2a	6,939	증)6,939
	배수성포장(t=5cm)	0	0	108.2a	33,099	증)33,099
	야간 조명비	0	0	108.2a	963	증)963
	빗물받이 벽체천공	0	0	30공	1,218	증)1,218
	포장장비 운반비	0	0	1회	1,353	증)1,353
	실명제표지판	0	0	4EA	46	증)46
	스텐유공관설치	0	0	800m	6,318	증)6,318
	소 계		60,560		49,936	증)49,936
제 경 비			26,124		21,139	증)21,139
도급비			86,684		71,075	증)71,075
관급자재비					135,239	증)135,239
총공사비					206,315	증)206,314

□ 조치의견

○ 본 구간은 차로단위 복구구간으로 기 시공된 배수성 포장의 기능 유지를 위해 동일 포장재(배수성포장)로 시공하는 것이 도로시설물 유지관리에 유리하므로 배수성포장재로 시공하고, 이로 인해 증감되는 금액은 향후 설계변경시 반영토록 조치코자 함.

붙임 : 산출내역서 1부. 끝.