문서번호	공원조성과-10522
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원디자인팀장	공원조성과장
임유미		代김대호	09/05 오순환
협조

시유공원 내 테마놀이터 재조성(서대문)

사업계획 변경 검토보고

2014. 9

푸른도시국

(공원조성과)

시유공원 내 테마놀이터 재조성(서대문)

사업계획 변경 검토보고

자치구로부터 시유공원 내 테마놀이터 재조성사업 관련 사업계획 변경 요청이 있어 검토하고 아래와 같이 보고함.

□ 관련대호 : 서대문구 푸른도시과-16559(2014.8.13.)호

□ 대 상 지 : 서대문구 인왕산 어린이놀이터(홍제5) 등 3개소

□ 추진경위

○ 2014. 2. 14. : 시유공원 내 테마놀이터 재조성 계획 수립 시달

○ 2014. 3. 11.	: 설계용역 발주

○ 2014. 3 ~ 4	: 사업설명회(어린이집·유치원), 주민설명회

○ 2014. 4. 29. : 설계용역 중간보고회

○ 2014. 6. 10. : 전문가 자문회의

○ 2014. 7 ~ 8	: 설계완료 및 계약심사

□ 사업계획 변경 내역 및 사유

(단위 : 천원)

연번	공원명	놀이터명	사 업 비		증 감	비 고
			변경전	변경후
		계	1,128,000	1,128,000	-
1	인 왕 산 도 시 자연공원	어린이놀이터(홍제5)	450,000	434,000	△16,000
2		어린이놀이터(쌈지)	400,000	412,000	12,000
3	궁 동 근린공원	어린이놀이터	278,000	282,000	4,000

○ 변경사유 : 범죄예방을 위한 방범시설(CCTV, 공원등) 설치에 따른

대상지별 사업비 조정

□ 검토의견

○ 이용자의 안전을 위해 방범시설을 설치하고자 하는 계획으로 타당함

□ 향후계획

○ 변경 내역을 해당 구청에 알림 및 계약심사 결과에 근거하여 예산 재배정

붙임 : 2014 시유공원 내 테마놀이터 재조성 사업비 변경(안) 1부.  끝.

(붙임)

2014 시유공원내 테마놀이터 재조성 사업비 변경(안)

(단위 : 천원)

연번	관리청	공원 및 놀이터명	위 치	면적 (㎡)	예 산		재배정 현황
					변경전	변경후 (증 감)	기배정	잔 액
계		7개소		10,323	2,206,000	2,206,000	589,522	1,616,478
1	서대문	인왕산도시자연공원 어린이놀이터(홍제5)	홍제동 산1-100	1,500	450,000	434,000 (△16,000)	18,973	431,027
2		인왕산도시자연공원 어린이놀이터(쌈지)	홍제동 산1-1	1,620	400,000	412,000 (12,000)	16,086	383,914
3		궁동근린공원 어린이놀이터(시민)	연희동 188-42	834	278,000	282,000 (4,000)	11,217	266,783
4	양 천	계남근린공원 어린이놀이터(다락골)	신정3동 521	1,200	319,200	319,200	309,872	9,328
5		용왕산근린공원 어린이놀이터1	목2동 202-25	310	215,300	215,300	215,300	0
6	서 초	우면산도시자연공원 어린이놀이터	우면동 71	3,362	280,000	280,000	18,074	261,926
7	구 로	고척근린공원 어린이놀이터	고척2동 산9-14	1,497	250,000	250,000	0	250,000
기타(시설부대비)					10,000	10,000	0	10,000
유보액					3,500	3,500	0	3,500