문서번호	토목부-17426
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	09/05 노우성

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

도로 종단계획고 조정  및 우수관로 규격 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

도로 종단계획고 조정 및 우수관로 규격 변경 검토보고

○ 암사 정수장앞 사거리 송수관로(D=2,200mm)는 강동·송파·강남·서초 약100만여 가구에 급수를 공급하는 시설이나 이설공사를 위해 단수시 주민 불편이 예상되어 종단계획고 조정 검토

○ 강동구에서 가재골마을입구 삼거리 부분은 주변의 유량이 모여지는 장소로 고덕1동 주택의 침수가 빈번히 발생됨을 이유로 산지측의 우수관로 규격 변경 등을 요청 이에 대한 변경 검토

관련근거

○ 암사정수수계 송수관로 협의회신(상수도사업본부 시설관리과-1022(2014. 2.14.)

○ 주민설명회 자문의견 반영 검토 요청(강동 도로과-14359(2014. 6.27.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4, 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 115,048백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

○ 감 리 사 : ㈜한국관리공사

현 황

○ 암사 정수센터 후문 진입도로에 매설되어 있는 송수관로(D=2,200mm)는 도로개설로 인하여 상수관 토피가 확보되지 않아 이설로 계획됨.

○ 가재골입구 삼거리앞 BOX(2.0m×2.0m)는 가재골에서 유입된 유량, 고덕산 기존도로(2차로)에서 유입되는 유량과, 고덕1동 단독주택지역의 유량이 집중적으로 모여져 병목 현상에 따라 침수가 빈번히 발생되고 있어 강동구에서 규격변경 및 배수처리 분류를 요청함.

검 토

《상수도 이설》

○ 송수관로(D=2,200mm) 이설을 위한 줄파기 결과 당초 계획보다 낮게 위치하고 있어, 기존 송수관로 존치 및 관경이상 토피를 확보하기 위해 도로종단 조정 필요

- 줄파기 결과를 토대로 도로종단 조정 시 송수관로 관경만큼 토피(H=2.2m)확보 가능

※ 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 종단조정

구 분	당 초		변 경		비고
	위 치	구배(%)	위 치	구배(%)
선사로∼ 고덕지구 (본선)	STA.1+180∼1+400(220M) ∙STA.1+180∼1+230( 50M) ∙STA.1+230∼1+320( 90M) ∙STA.1+320∼1+400( 80M)	(+)3.80 (+)1.12 (+)4.86	STA.1+180∼1+400(220M) ∙STA.1+180∼1+265( 85M) ∙STA.1+265∼1+345( 80M) ∙STA.1+345∼1+400( 55M)	(+)3.80 (+)1.119 (+)4.86

◇ 관련규정

○ 「상수도시설기준」(환경부제정, 2010년)의 4.2.6 ‘관로의 매설위치 및 깊이’

- 2항 : 관로의 매설 깊이는 관경 1,000㎜이상은 150㎝이상으로 하고, 도로하중을 고려하여야 할 위치에 대구경을 매설 할 경우에는 매설 깊이를 관경보다 크게 할 것.

3항 : 도로하중을 고려할 필요가 없으나 지반이 암반인 경우 등으로 부득이 하게 매우 얕게 매설해야 할 경우에는 별도의 관을 보호하는 조치를 강구한다.

※ 해설 : 관의 바로 윗부분의 노면에 콘크리트 또는 철근콘크리트 슬래브를 설치하거나 라멘으로 관을 싸서 보호한다.

○ 암사 정수센터앞 도로종단 조정에 의한 주영향은 “구리 암사대교 연결도로공사” 까지 영향이 있으므로, 동 공사 종단조정까지 실시설계에 포함하여 반영

※ 구리 암사대교 연결도로 공사 종단조정

구 분	당 초		변 경		비고
	위 치	구배(%)	위 치	구배(%)
암사대교∼ 고덕지구 (연결로)	STA.2+180∼2+340(160M) ∙STA.2+180∼2+315(135M) ∙STA.2+315∼2+340( 25M)	(-)1.86 (+)4.74	STA.2+180∼2+340(160M) ∙STA.2+180∼2+315(135M) ∙STA.2+315∼2+340( 25M)	(-)4.90 (+)4.74

《하수관경 확대 등》

○ 가재 골 입구 삼거리 주택가 침수예방을 위해 수리계산 값을 토대로 가재 골 우·오수 합류식(D450mm)은 관경 확대와 더불어 배수처리를 기존하수BOX(2.0×2.0m)가 아닌 산지 측에 신설예정인 하수관으로 관경을 확대하여 배수처리가 필요함.

※ 우수관 변경 현황

구분	당 초		변 경		비고
	위 치	관경	위 치	관경
우수 관공 (본선 좌측)	STA.2+040∼2+120(80m) STA.2+120∼2+240(120m) STA.2+240∼2+428(188m) (이후 구간유출) STA.2+410∼2+537(127m) 계: 515m	D 600 D 800 D1000 D 600	STA.2+040∼2+240(200m) STA.2+240∼2+537(297m) (이후 구간유출) STA.2+380∼2+427(47m) (이후 구간유출) ∙가재골진입로 STA.0+040∼0+097(78m) 계: 622m	D1000 D1200 D 600 D 800

개략공사비

○ 종단조정 및 종배수관 변경

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증· 감	비고
직접공사비	식	14,067,285	14,072,600	증) 5,315
제 잡 비	식	2,486,715	2,499,400	증) 12,685
소 계		16,554,000	16,572,000	증) 18,000
부 가 세	식	1,655,400	1,657,200	증) 1,800
도급공사비		18,209,400	18,229,200	증) 19,800
관급자재비	식	1,541,000	1,566,000	증) 25,000
총공사비		19,750,400	19,795,200	증) 44,800

○ 삭제공종                                                 (단위 : 천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 감	비고
154KW 케이블이설	식	523,630	0	-523,630
송수관로	식	2,599,140	355,106	-2,244,034
계		3,122,770	355,106	-2,767,664

감리단 검토 의견

○ 송수관로(D=2,200㎜, L=120m) 존치를 위한 암사정수장 사거리 종단계획고 조정 및 강동구청 민원 요구사항 우수관로관경(D600∼D1000㎜ → D1000~1200㎜) 변경에 따른 실정보고 사항임.

○ 공사계약 일반조건 Ⅵ.공사설계의 변경 1.설계변경 “가‘’항목중 4)발주기관이 설계서를 변경 할 필요가 있다고 인정할 경우를 근거로 하여 추후 설계변경 함이 적정하다고 사료됨.

조치계획

○ 감리단 검토의견과 같이 송수관로(D=2200mm, L=120m)·154KW 케이블 이설시 발생될 위험요소 제거 및 예산절감(27.6억원)을 위해 종단조정이 필요 함.

- 종단조정 실시설계 완료도면에 대하여 “선사로~ 고덕지구간 도로확장공사”와 “구리암사대교 연결도로공사”에 작업지시 하고자 함.

○ 고덕1동 구간의 집중호우시 침수피해를 예방하고자 수리계산 값에 의해 하수관 확대 및 배수관로를 산지측으로 처리(증 약 4천만원)가 필요함.

○ 감액되는 공사비 27.2억원에 대하여는 설계변경 정산에 반영하고자 함.

붙 임 : 1. 감리 의견서 1부.

2.  종단선형 변경도면 각 3부.  끝.