문서번호	공원운영과-12977
결재일자	2014.9.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	공원운영과장
최지효	백운도	09/11 박경애
협 조
	주무관		이주상
	주무관		정해교
	주무관		김욱
	주무관		허정

'14년 하반기

보라매공원 시설공사 하자조사 추진계획

2014. 9.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

‘14년 하반기

보라매공원 시설공사 하자조사 추진계획

‘14년 8월까지 완료한 보라매공원 시설공사를 대상으로 하자조사를 추진하여 수목 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공 사 현 황

❍ 하자대상 공사 현황 : 공사 11건, 관급자재 16건

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고
1	보라매공원 북동산 절개지 옹벽설치공사	‘12.6.8 ‘12.7.27	개비온옹벽 등 4종	에스케이임업	‘12.7.28 ~’17.7.27	5년
2	보라매공원 어린이 테마놀이터 재조성공사	‘12.10.11 ~’13.3.30	조합놀이대 등 11종	원성종합건설(주)	‘13.3.31 ~’15.3.30	2년
2-1	관급자재 <탄성포장재>	‘12.9.12 ~‘12.12.9	탄성포장재	에코텍(주)	‘12.12.9 ~‘14.12.8	2년
2-2	관급자재 <조합놀이대>	‘12.9.12 ~‘12.11.30	조합놀이대	㈜디자인파크개발	‘12.11.30 ~‘14.11.29	2년
2-3	관급자재 <퍼걸러>	‘12.9.12 ~‘12.11.29	퍼걸러	데오스웍스	‘12.11.29 ~‘14.11.28	2년
3	보라매공원 인조잔디 축구장 재조성공사	‘13.5.6 ~‘13.7.30	인조잔디 교체 등 4종	원방랜텍(주)	‘13.7.31 ~’16.7.30	3년
3-1	관급자재 <인조잔디>	‘13.6.27 ~‘13.7.29	인조잔디 인조잔디충진재	코니그린(주)	‘13.7.29 ~‘16.7.28	3년
4	2013 보라매공원 시설물 보수정비공사	‘13.6.16 ~‘13.9.30	우수관로 교체 등 8종	우희조경(주)	‘13.10.1 ~’15.9.30	2년
4-1	관급자재 <운동기구>	‘13.5.8 ~‘13.7.30	역기들어올리기	㈜승리체육산업	‘13.7.30 ~‘15.7.29	2년
4-2	관급자재 <운동기구>	‘13.5.8 ~‘13.7.30	윗몸일으키기 공중걷기	경일산업(주)	‘13.7.31 ~‘15.7.30	2년
4-3	관급자재 <벤치>	‘13.5.8 ~‘13.8.14	옥외용벤치	경일산업(주)	‘13.8.15 ~‘15.8.14	2년
4-4	관급자재 <운동기구>	‘13.7.18 ~‘13.8.21	윗몸일으키기 3단철봉 허리돌리기	경일산업(주)	‘13.8.22 ~‘15.8.21	2년
5	보라매공원 대형수목 생육개선공사	‘13.10.4 ~‘13.10.30	유기질비료 투입 등 4종	한국나무종합병원	‘13.10.31 ~’15.10.30	2년
6	보라매공원 발자취를 더듬어보는 테마공원 조성공사	‘13.10.25 ~‘13.12.27	충효탑 정비 등	화룡종합조경(주)	‘13.12.28 ~’15.12.27	2년
7	보라매공원 외 3개소 독서쉼터 설치공사	‘12.12.27 ~‘13.4.25	목재데크 2개소, 야외테이블 4개소	유호산업개발(주)	‘13.5.3 ~‘15.5.2	2년
8	보라매 무장애 친화공원 조성공사	‘13.12.20 ~‘14.5.20	장애인, 노약자 등 교통약자를 위한 공원시설개선	레이크랜드(주)	‘14.5.24 ~‘16.5.23	2년
8-1	관급자재 <등의자>	‘13.12.20 ~‘14.5.20	등의자 60개	세민조경	‘14.5.20 ~‘16.5.19	2년
8-2	관급자재 <경화토포장>	‘13.12.20 ~‘14.5.20	경화토포장 871.5㎡	㈜에프씨코리아랜드	‘14.5.20 ~‘16.5.19	2년
8-3	관급자재 <파고라>	‘13.12.20 ~‘14.3.20	파고라 1조	예건	‘14.3.20 ~‘16.3.19	2년
8-4	관급자재 <볼라드>	‘13.12.20 ~‘14.3.25	매립식 60개 이동식 26개	한길이엔지	‘14.3.25 ~‘15.3.24	1년
8-5	관급자재 <토양개량제>	‘13.12.20 ~‘14.5.8	토양개량제 1202포	㈜가림환경개발	‘14.5.8 ~‘15.5.7	1년
9	보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사	‘13.12.29 ~‘14.6.20	남문,놀이터 화장실 리모델링 등	㈜동영피앤씨	공종별 상이	-
9-1	가설, 타일 미장 기타건축공사	〃	〃	〃	‘14.6.25 ~‘15.6.24	1년
9-2	조적, 석, 금속 설비공사	〃	〃	〃	‘14.6.25 ~‘16.6.24	2년
9-3	방수공사	〃	〃	〃	‘14.6.25 ~‘17.6.24	3년
10	보라매 무장애 친화공원 전기공사	‘13.12.23 ~‘14.6.26	공원등주 LED 교체, 공원등주 이설 및 조명개선, 화장실 전기설비	해동전설(주)	‘14.7.1 ~’15.6.30	1년
11	2014 보라매공원 시설물 정비공사	‘14.5.26 ~‘14.7.24	테니스장 정비 북동산, 와우산 토사유출사면 정비 등	㈜동림종합조경	‘14.8.6 ~‘16.8.5	2년
11-1	관급자재 <등의자>	‘14.7.2 ~‘14.7.24	등의자 10개	㈜예건	‘14.7.24 ~‘16.7.23	2년
11-2	관급자재 <클레이>	‘14.6.27 ~‘14.7.23	BN-ETC-Q 972㎡	㈜베노	‘14.7.23 ~‘16.7.22	2년
11-3	관급자재 <인조잔디>	‘14.5.22 ~‘14.7.17	인조잔디 2,536㎡	㈜대건씨앤엘	‘14.7.19 ~‘17.7.18	3년

Ⅱ		하자조사 추진계획

❍ 조사기간 : ‘14. 9. 15 ~ 9. 26

❍ 조사대상 : 공사 11건, 관급자재 16건

❍ 조사내용

- 공사별 시공자 입회하에 하자 유무 조사

- 시공자 미입회시 자체 하자조사 실시

- 하자조사 결과 안전과 직결된 사항 등 중대한 사항에 대하여는 안전통제 및 시공사에 우선 조치 통보

Ⅲ		향 후 계 획

❍ ‘14.  9. 12 : 시공사 입회 공문 발송

❍ ‘14.  9. 15 ~ 9. 26 : 하자조사 및 결과 보고

❍ ‘14.  9. 29 : 하자 이행 통보

❍ ‘14. 10. 24 : 하자 이행 완료.  끝.