문서번호	지리정보과-3645
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		지리정보과장	시설안전부장
장기덕		오기석	09/11 이규상
협 조

「’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공정 보고회 및 간담회 개최 계획(8월)

2014. 9.

상수도사업본부

지리정보과

「’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공정 보고회 및 간담회 개최 계획(8월)

『’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』의 내실있는 사업추진을  위하여 8월 공정 보고회 및 간담회를 개최하고자 함.

□ 용역개요

❍ ’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 용역

구 분	서 북 지 역	서 남 지 역	동 남 지 역
용역내용	측량 및 편집 : 182㎞ (신설43km, 기존139km)	측량 및 편집 : 182㎞ (신설26km, 기존156km)	측량 및 편집 : 186㎞ (신설35km, 기존151km)
용역기간	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31
용 역 비	1,348,740천원	1,143,750천원	1,373,000천원
사 업 자	중앙항업(주)외 2 [(주)제일항업,(주)해양정보기술]	공간정보기술(주)외 2 [삼아항업(주),네이버시스템(주)]	새한항업(주)외 2 [범아엔지니어링(주),한국에스지티(주)]
해 당 사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

□ 공정보고회 및 간담회 개요

❍ 일    시 : 2014. 9. 19(금) 15 : 00 ~

❍ 장    소 : 본부 4층 회의실

❍ 참석대상 : 11명

․ 본  부 : 시설안전부장, 지리정보과장, 업무담당자(3명)

․ 용역사 : 동남, 서북, 서남 용역(사업책임자, 공정업무 담당자)

❍ 주요 내용

- 불탐구간해소 방안 및 작업현장 안전관리대책 보고

- 8월 추진실적 및 향후 추진계획 등 사업수행 관련사항 보고

- 용역수행에 따른 애로사항 및 작업시 유의사항

- 밀페공간 작업에 따른 현장 안전관리 주의사항 및 업무지시 등

□ 추진실적

❍ 공정현황

(8월 31일 기준 : 단위 km)

구 분		대 상	전월누계	금 월	누 계	공정(%)	비 고
계		550	385	39	424	77.0
동 남	소 계	186	124	18	142	76.3
	신 설	35	23	2	25	71.4
	기 존	151	101	16	117	77.5
서 북	소 계	182	146	10	156	85.7
	신 설	43	17	3	20	46.5
	기 존	139	129	7	136	97.8
서 남	소 계	182	115	11	126	69.2
	신 설	26	10	3	13	50.0
	기 존	156	105	8	113	72.4

□ 진행순서

❍	15:00 ~ 15:10  부장님 인사 말씀

❍ 15:10 ~ 15:45  추진실적 및 현황사항 보고(사업별 각 10분)

❍ 15:45 ~ 16:00  질의응답 및 지시사항 전달

□ 향후계획

❍ 보고회에서 제시된 의견 검토하여 사업에 반영

❍ 9월 공정보고회 개최 : ‘14. 10월(예정).  끝.