문서번호	급수운영과-17652
결재일자	2014.9.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
전성호		강동철	09/11 장종욱
협 조

작업지시 변경보고

(마포구 아현동 601-2 ~ 603-43)

2014. 09.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 아현동 지역담당 업무 수행중 아래와 같은 사항이 있어 현장조사하고

보고합니다.

2014. 09.                                                    보고자 : 시설7급  전성호

1. 현    황

○ 위         치 : 마포구 아현동 601-2번지 ~ 603-43

○ 작업자시 번호 : 개량 33

○ 공 사 개 요   : 당 초 D=100mm, L=30m (2014.9.2. ~ 9.16)

변 경 D=200mm, L=30m (2014.9.2. ~ 9.19)

2. 보 고 내 용

- ****************************************는 관말지역으로

순환배관을 위해 100mm관을 부설토록 작업지시 하였으나,

- 부설구간은 아현4구역 재개발 지역 주인입관로 구간으로, 2007.8.2. 급수협의시

200mm 계량기 설치토록 협의된바, 100mm을 200mm로 확대 부설함이 타당하다고

사료됨.(급수협의 시설관리과-9877)

5. 조치의견

- 상기와 같은 실정으로 순환배관하여 급수관리에 만전을 기하고자 하며,

- 이에 따른 설치공사는 ***********************로 하여금 시공토록        하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사비 금액 : 1,050만원

【위 치 도】

순환배관 관로부설

아현4구역