문서번호	민원분석과-3552
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★평가팀장	민원분석과장		경영관리부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
이문자	양연화		김영기		구아미		04/28 백호
협 조
	요금관리부장					장화영
	생산부장					서대훈
	급수부장					신용철
	시설관리부장					강호광
	주무관					박찬종
	주무관					정수지

2021년 1분기 주요사업 평가결과

2021.  4.

상수도사업본부

(경영관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

목    차

Ⅰ.	추진개요	1
Ⅱ.	평가결과	2
Ⅲ.	사업별 세부결과	4
①	상수도 전문성 및 현장대응능력 강화	4
②	상수도 요금조정 및 체계개편	5
③	공유재산의 효율적·체계적인 관리운영	7
④	입상활성탄 신탄교체	9
⑤	유충 등 수질관리 종합대책 추진	11
⑥	활성탄지 역세척수 회수시설 개선	15
⑦	입상활성탄 / 모래 시범 운영	17
⑧	정수센터 정비방안 검토 용역(순환정비 등)	19
⑨	장기사용 송배수관 정비(교체,갱생)	20
⑩	대형 상수도관 관세척 시행	22
⑪	행정동별 수질자동측정기 설치	24
⑫	주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원	26
⑬	장기사용 배급수관 정비	28
⑭	광암수계 배수관로정비	30
	상수도 GIS DB 정확도 개선	32
Ⅳ.	향후계획	34
	붙임 1. 1분기 주요사업 공정현황 1부 2. 유충 등 수질관리 사업 공정현황 1부. 3. 사업별 예산집행 현황 1부.	35

2021년 1분기 주요사업 정기평가 결과

주요 핵심사업이 당초 계획대로 완수되어 적기에 성과를 달성할 수 있도록 추진 공정을 평가하고, 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		평가개요

□ 추진근거

○ 市 업무 등의 평가에 관한 규칙 제5조(평가대상) 및 12조(목표관리)

○ 2021년 상수도 주요사업 평가계획(민원분석과-568, ‘21.1.20.)

□ 1분기 평가개요

○ 평가대상 : 15개 사업(유충대책 18개 사업 포함)

○ 평가범위 : 1분기 추진실적 전반

○ 평가항목 : 공정관리(당초 사업목표 대비 사업 진척수준, 예산집행실적 등)

○ 평가방법 : 서면자료 분석   ※ 평가기간 : 4.7. ~ 4.23.(약 3주간)

	‘21년 평가개요
❙ 평가대상 : 5개 분야 50개 사업(핵심 15, 일반 35) ❙ 평가주기 : 핵심사업(분기), 일반사업(반기) ❙ 평가방법 : 추진실적 정량평가 및 외부 전문가 현장평가 병행 ❙ 평가내용 : 사업 목표 대비 추진실적 등 공정사항 － 사전준비, 계획수립, 착수, 준공 등 진척수준 단계별 공정(추진실적)확인 ❙ 결과활용 : 부진사업 대책 마련 및 예산 편성 자료로 활용

Ⅱ		평가결과

□ 총 괄

○ *********************************

*******************

- (정상 추진) 상수도전문성 및 현장대응능력강화 등 13개

- ********************************

○ *******************************************************************할 것으로 분석

- ****************************************

- ********************************

▸ 신규사업으로 금년목표 40㎞ 중 일부 10㎞ 구간에 한해 시범용역 추진결과에 따라 잔여구간 계획 수립예정

□ 공정 요약

○ 경영 효율화 사업 등(5개)은 당초 계획에 의거 원활히 추진 중

- (상수도 전문성 및 현장대응능력 강화) 인력증원, 기관명칭 등 市와 지속 협의

- (요금조정·체계개편) 요금인상 대비 업무매뉴얼, 교육자료 제작, 홍보방안 마련 등 사전준비 추진

- (공유재산 관리) ************************** 제고

- (입상활성탄/모래 시범운영) 水내 입자수, 총세균수 저감 효과 확인

- (주택 노후관 지원) 금년 목표대비 56.0% 추진

○ 수질·관망개선 사업(8개)은 계획, 사전절차, 계약, 착수 등 단계별 진행 중

- (입상활성탄 교체, 정수센터 순환정비) 계약 완료 후 사업 착수 원활히 진행 중

- (장기사용 배급수관) 21개 세부사업 중 8개 계약완료, 그 외는 4월 계약

- (장기사용 송배수관) 15개 세부사업 중 입찰공고(3건), 그 외는 사전절차 진행

- (수질자동측정기 설치, GIS DB 개선) 입찰공고 후 계약자 선정 단계

○ 유충 예방 사업(18개)  ※ ********************************

- 유충 대응을 위한 모니터링, TF구성 등 자체 대응사업은 원활히 추진 중

- 다만, ***************************************************************************************

- 정수설비 개선 사업은 9월 이전 준공목표로 차질없이 진행 중

□ 예산집행 실적 (1분기)

○ 사업예산 131,246백만원 중 10,036백만원 집행, 집행률 7.6%

Ⅲ		사업별 세부 결과

1		상수도 전문성 및 현장대응능력 강화 [정상추진]

❖ 현장 대응능력 강화를 위한 인력증원 등 협의, 市와 진행 중

❖ 안전조사과 신설 및 실제상황에 효과적 대처를 위한 실습장 건축 추진

□ 사업내용

○ 현장 주도적 대응을 위한 인력증원 단계적 협의 및 조직구조 개편

- 전보기준 개선, 현장 전문인력 확보, 수도전문관 운영

○ 현장과 동일한 실습시설 조성을 통한 상수도 인력 전문성 제고

○ 안전조사과, 수계조절실, 기반시설과 신설‧운영으로 대응체계 강화

□ 추진실적 및 세부결과

○ 현장대응력 강화를 위한 안전조사과 신설               : 1월

- 상수도시설물 및 공사장 안전점검, 재난안전관리, 지하시설물 안전관리 등

○ 강북아리수정수센터 현장실습장 기술용역 타당성 심사요청     :  3월

- 실증시설(실외) 조성에 대한 관련부서 의견 반영 **************

○ 현장 전담인력 정원 관련 조직담당관 협의 추진      : ~ 3월

- 유충업무(28명) 및 수질측정기 설치관련(9명) 등 현장인력 증원 논의

- 市 조직담당관과 1차(1.27.), 2차(2.23.), 3차(3.25.) 정원 증원 관련 협의

○ 수도사업소 기관명칭 변경을 위한 설문조사 시행

- 상수도사업본부 전 직원 대상 4일간(3.30.~4.2.) 실시 결과 131건 공모

- 명칭변경(안)에 대해 조직담당관 협의(4월말) → 조례개정(6월) 추진

2		상수도 요금조정 및 체계개편 [정상추진]

❖ 지난 9년간 동결된 수도요금 인상 등 요금체계 개편 추진

❖ 요금인상에 따른 민원최소화를 위한 업무매뉴얼 및 교육자료 제작 중

□ 사업개요

○ 사업목표 : 요금체계 개편을 통한 재정건전성 확보 및 효율성 증대

○ 사업내용

- 요금인상 : 연간 톤(㎥)당 평균 73원씩 3개년 간 단계적 인상(‘21~’23년)

- 누진제 폐지 : 3단계 누진요금제에서 단일요금제로 통합(‘22년부터 모든 업종)

- 업종 통합 : 공공용 폐지 및 일반용으로 통합(‘22년부터 업종 4개 → 3개)

□ 추진실적

○ 요금체계 사전준비 T/F팀 구성 및 운영            :  1월 ~

- 요금과 업무숙련자 및 신규자 포함 8명(본부 4․사업소 4)으로 구성

- 민원응대 매뉴얼(Q&A) 및 배포자료 제작을 위한 TFT 회의 개최 : 2.3.

○ 요금체계개편에 따른 직원 교육자료 제작 계획수립  :  1월

- 1부(질문과 답변 매뉴얼), 2부(재정여건), 3부(인상 필요성), 4부(주요개정내용)로 구성

○ 요금프로그램(Arisu인포, 검침PDA) 전산정비      :   ~ 3월

- 테스트 서버 구축하여 요금관련 전산프로그램 사전정비 완료 및 지속적 개선

○ 최종 의결예정 인상 요율 적용하여 요금검증 실시    :   ~ 3월

- 통합 테스트서버에서 납기별 1,000건씩 요금계산 정확도 검증

[상수도 통합 테스트서버]	[아리수 인포 개발시스템]	[요금계산 테스트 화면]

□ 세부결과

○ 테스트서버 구축을 통한 납기별 요금계산 정확도 검증 : 정상추진 중

- 향후 최종의결된 인상 요율을 적용할 수 있도록 납기별 일정에 따라 요금계산 테스트 실시

►  심사마감(10일) → 사업소별 대상배포(17일) → 테스트(30일) → 본부검증(5일)

- 전체 6회(4월 종료) 중 ‘20.11월부터 ’21.3월까지 총 5회차 검증완료 : 공정률 83%

구 분	대 상	검증건수(건)	결 과
3회차(‘21.1월)	욕탕용, 공공용	1,000(사업소8개×125)	정상
4회차(‘21.2월)	공공용, 일반용	1,000(사업소8개×125)	정상
5회차(‘21.3월)	다량급수처(월 300㎥↑)	1,000(사업소8개×125)	정상

○ 민원응대를 위한 직원 교육자료(업무매뉴얼) 제작 : 정상추진 중

- 내부직원(요금과, 민원처리팀), 시설관리공단(계량기 검침원), 120다산콜센터 대상

- 교육자료 제작 후 직원응대 및 시민홍보를 위한 홍보물 제작 관련 홍보과 협의예정

매뉴얼 제작 방향 및 내용 협의를 위한

회의 개최

2.3.

매뉴얼 초안 작성

(요금제도과)

~ 2.10.

초안 검토 및 수정

(TF 팀원)

2.15. ~ 2.18.

교육자료 제작

(현장실무용)

~ 4월말

완료

○ 요금체계개편 대시민홍보는 의회 통과시 즉시 시행할 수 있도록 준비 중

- 사전준비 TF팀이 매월 직원의견 수렴을 거쳐 홍보방안을 마련

- 시의회 본회의 의결, 수도조례 개정 등 의회 결정시 즉시 홍보 예정

3		공유재산의 효율적․체계적인 관리운영 [정상추진]

❖ 1분기에 *****************으로 세입제고*********

❖ 변상금 체납 인센티브 방안 마련 및 행정처분으로 악성체납 징수 예정

□ 사업개요

○ 사업대상

- ****************************          (‘21.1월 기준)

*****	*	**** 행정재산: 상수도목적 사용(청사, 정수장, 배수지 등), 일반재산 : 상수도목적으로 미사용(폐가압장, 도로, 나대지 등)	****
********	***	***	***
********	*********	*********	******
********	******	******	***

○ 사업내용

- ********************************

***************************************

- 공유재산 임대료 및 변상금 부과․징수 현황 파악 및 체납관리

□ 추진실적

○ 공유재산의 효율적․체계적인 관리운영 방안 방침수립      :   2.2.

- 구)성북청사 유상이관 관련 시민소통담당관과 협의

- 임대료 부과 또는 활용가능 재산의 관리실태에 대한 데이터 구축

- 각 사업소별 변상금 체납 징수 독려 및 인센티브 지급

○ 시유재산 유․무상 임대 조사결과 후속조치 이행 방침수립    :     3.19.

- 공용목적(공공기관, 비영리법인 등)으로 임대한 물건 37건 조사(2.25~3.5)

► ******************************

- 무*********************************************************************************

※ *******************************************

□ 세부결과

○ ******************************************************************

- 매각현황                                            (단위:백만원)

**	***	***	*****	****	***
*	***	***************	****	***	****
*	****	****************	****	***	*****
*	****	***********	****	**	******************

*****

*****************	******************	*************

**    ※ ************************************************************

○ 구)성북청사(‘21.4.30.만료) 관련 유상이관대금 예산편성 요청 (⇒ 시민봉사담당관)

-  ‘22년도 유상회계 이관대금 예산 미편성 시 ********** 통보

-  ***************************************

※ ‘****************

○ 변상금 악성체납 징수 독려 및 직원 인센티브 방안 신설 시행

- 체납 현장상황 파악 및 행정처분을 적극 실시예정, 인센티브는 분기별 포상

※ 임대료 및 변상금 부과 현황(‘21.3월 기준, 단위: 천원)

****	*** ***	****		***		***
		**	***	**	***	**	***
***	****	**	*******	**	*******	**	******
***	****	**	*******	**	*******	**	******
***	****	*	*****	*	*****	*	*****

4		입상활성탄 신탄 교체 추진 [정상추진]

❖ 금년 입상활성탄 교체량(7,899㎥)은 전체(6개 정수센터)의 19% 수준

❖ 5개 정수센터에서 3월까지 구매계약을 모두 완료

□ 사업개요

○ 사업규모 : 5개 정수센터 입상활성탄 7,899㎥ 구매·교체

○ 사업기간 : ’21.1.1. ~ ’21.12.31.

○ 소요예산 : 16,978백만원(이월 728백만원 포함)    (단위: ㎥, 백만원)

구 분		계	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북	광 암
‘21년	계 획 량	7,899	1,320	1,344	921	2,574	1,740	-
	소요예산	16,250	2,737	2,787	1,848	5,299	3,579	-
‘20년	이 월 량	4,914	-	-	-	2,002	2,332	580
	소요예산	728	-	-	-	311	335	82

□ 추진실적

○ 2020년 이월물량(4,914㎥) 교체 완료            : ~ 2월.

○ 2021년 입상활성탄 구매 계약 체결            : ~ 3월.

구 분	구의	뚝도	영등포	암사	강북
발주일	2.3	2.5	2.23	2.3	’20년 장기계속계약
계약일	2.23	3.3	3.24	2.23

○ 예산집행실적                                        (단위: 백만원)

사 업 명	예산현액 (이월포함)	집행액(지출액)	집행률(%)
입상활성탄 신탄교체 추진	******	***	***

□ 세부결과

○ 금년 입상활성탄 교체량은 전체(6개 정수센터)의 19% 수준

- 전체(41,107㎥, 148지), ‘21년(7,899㎥, 28지)

※ ******************************

*******		*	***	***	***	***	***	***
**	******	******	*****	*****	*****	*****	******	*****
	*********	***	**	**	**	**	**	**
**	***	**	*	*	*	*	**	**
	******	****	****	*	*	****	****	****

▸ 교체주기 : 6년 (근거 : 활성탄 재생시설 건설 경제성 검토 보고,’16.10)

○ ***************************************************************

○ 원활한 활성탄 구매 및 교체공사를 위해 장기계속계약으로 추진

⇒ 5개 정수센터가 계약을 완료하고, 12월까지 분할납품 예정

- 납품개시(7월) - 교체작업개시(11월) - 납품완료(12월)

※ 입상활성탄 신탄 교체 과정

[장기사용 폐탄 준설]	[신탄 투입 및 포설]	[활성탄지 강화 역세척]	[수질 안정화 후 통수]

５		유충 등 수질관리 종합대책 추진 [정상추진]

❖ 전체사업이 당초 계획대로 추진중, 1분기 시설점검 완료 후 보완 중

❖ 염소투입시설(3개소), 시동방수개선(광암), 오존투입기(강북)설치는 사전절차 이행

□ 사업개요

○ 사업대상 : 유충 종합대책(18개 사업)

○ 사업기간 : 연중

○ 소요예산 : 3,540백만원

○ 사업내용 : 정수센터 운영관리·시설개선, 운영인력 전문화 등

□ 추진실적

○ 유충 등 수돗물 수질관리 실행계획 수립  : 2월

계	정수센터 운영관리	정수센터 시설개선	운영인력 전문화	유충대응 등
18개 사업	5	6	3	4

○ 1/4분기 취,정수 시설물 통합 안전점검   : 3월

- 점검기간 : ‘21.3.4 ~ 3.12.(기간중 6일)

- 점검대상 : 정수센터 청결 환경 관리 및 조성여부

- 점검방법 : 본부, 정수센터 및 외부 민간 전문가 합동 점검

- 점검결과 : *******************************

○ 예산집행현황                                  (단위: 백만원)

사 업 명	예산현액	집행액(지출액)	집행률(%)
유충대책(18개 사업)	3,540	169	4.8

□ 세부결과

○ 정수장 운영관리 강화

① 365일 유충 모니터링 및 발생시 공정운영 강화

- ‘21.1.2 ~ 3.31.(수)까지 생물 활동기별 모니터링 실시(지속 진행 중)

- 표준여과지, 활성탄지 유충 검출시 공정운영 강화 : 소독 및 역세척주기 강화(매뉴얼에 따라 실시)

-「상수도 유충」 대응 매뉴얼 작성시 유충모니터링 대상 및 주기 변경 : ‘21.3.모니터링단계 재검토

② 생물체 유입 차단시설 설치

***************************************************************************

※ *************************************

**	*	**	**	**	***	**	**
******	***	**	**	**	**	**	**

▸ ******************************************************************

③ 생물 모니터링 및 전담 관리제 운영

- 정수센터별 연구직원 2명씩 구성 운영 분야별 전담 협력 대응

- ******************************************************** 등

④ 생물제어 공정개발 연구

- 「***********************************************

**********************************

************************************

※ 결과 도출 후 현장 적용성 등 검토 및 반영예정

⑤ 식품안정경영시스템(ISO22000) 운영 내실화

- 정수센터 위생관리 시설 보완 : 15개소(광암9, 구의2, 암사4)

바닥청소기 9대(영등포4, 암사5), 전동식 마스크 32대 구입(센터별 4~7대)

- ISO2200 사후관리 심사(’21.4.) 사전준비

○ 정수센터 시설개선

⑥ 활성탄지 역세척수 염소 투입시설 설치
	************************************************** ***************************************************
⑦ 암사정수센터 활성탄지 역세척수 회수시설 개선
	********************************************** ********************
⑧ 광암정수센터 시동방수 시설 개선
	************************************ ***********************************
⑨ 오존 적정 투입시설 확보 및 설비 보호 방안 강구
	***************************************** ********************************************
⑩ 활성탄지 계열화 및 By-Pass 배관 설치
	- ******************************* *********************************************
⑪ 침전지 덮개 설치
	********************************* *********************************************************

○ 운영인력 전문성 강화

⑫ 정수센터 운영 전문인력 보강
	- **************************************** - 기초 직무교육 교안 작성 및 신규임용자(44명) 교육(’21.1.25.) 완료
⑬ 정수시설 운영관리사 확보
	- ******************************** ************************************* ***************************************************** ****************************
⑭ 민․관합동 조사단 구성․운영
	- 구성 운영 완료(2월) : 총 14명(생물전문가 6, 상수도전문가 2, 본부․물연구원 6) - 상수도 생물(유충) 발생 대비 토론회 주제발표 및 토론자 참석(3.31)

○ 유충대응 및 민원응대

⑮ 유충 대응 TF 구성 및 운영
	- 본부, 물연구원, 수도사업소, 정수센터 TF팀 구성완료 : 2~3월 - 유충 발생 대비 회의 및 토론회 실시 : 3회(1.26, 3.4, 3.31) - 유충 발생 대비 정수시설 운영실태 점검(1회, 3.4~3.12)
유충민원 대응체계 구축
	- 사업소별 합동조사반 편성(2월), ********* 매뉴얼 작성(3월) - ********************************(3월) - 유충 민원 관리체계 개선을 위한 고객시스템 기능개선 요청(3월) 등
유충민원 정밀역학조사반 구성․운영
	-****************************** *******************************************
유충 발생 방지를 위한 배수지 관리 강화
	************************* *************************************** ************************ ***************************** ******************************************* ************************************

6		활성탄지 역세척수 회수시설 개선 [정상추진]

❖ 암사정수센터 활성탄지 회수조 이송용량 개선사업으로 5월내 완료 예정

❖ 기계, 전기, 토목 공사가 원활히 진행되어 1분기 공정률 70% 달성

□ 사업개요

○ 사업대상 : 암사정수센터 활성탄지 회수펌프 용량증설

○ 사업기간 : ’21.1. ~ 5.

○ 소요예산 : ********

○ 사업내용 : *********************************

회수조 : 활성탄 역세척수를 처리하는 배출수지의 상등수를 착수정으로 압송하여 재활용하기 위한 조(槽)

- ***************************

※ 활성탄지 회수펌프 증설 공사 과정

[회수조 상부]	[수중펌프 설치]	[토출 이송배관 부설]	[제어반 설치]

□ 추진실적

○ 암사 활성탄지 회수조 증설관리 정비계획 수립         :    1월

○ 기계, 토목, 전기 공사 계약 완료(총 9건 중 8건)       :  ~3월

※ 전기 감시제어설비 공사(1건)는 4월 계약

○ 예산집행실적                                    (단위: 백만원)

사 업 명	예산현액	집행액(지출액)	집행률(%)
*****************	*****	0	0

□ 세부결과

○ 생물 번식 왕성기에 활성탄지 역세척 주기 단축을 위한 시설 개선사업으로 5월내 완료 예정(3월말, 공정률 70%)

※ 적정주기 역세척이 활성탄지 생물번식 및 거동 방지에 가장 효과 (물연구원, ‘20.8.)

- 분야별 추진일정

분 야	구 분	1 월		2 월		3 월		4~5월		공정률(%)
기 계	관급자재(펌프 등) 제작·납품									100
	자재준비 및 기계설비공사									80
토 목	관급자재(주철관 등) 제작·납품									80
	부단수천공 및 배관부설공사									60
전 기	기동반 등 제작·납품									70
	전기·통신공사, HMI 구축 등									40

- 활성탄지 회수조펌프 증설전후 효과 예측 비교(암사)

******	*********	*********
********	*********	*********
** *** **	***********	**********

‣ **********************************************

7		입상활성탄/모래 시범운영 [정상추진]

❖ 입상활성탄에 **********시***************** 확인

❖ **********************확인 ⇒ 영등포·암사센터로 확대운영

□ 사업개요

○ 사업대상 : 영등포정수센터 활성탄흡착지 1개지

○ 사업기간 : ’21.1. ~ 12.(1년)

○ 소요예산 : 비예산

○ 사업내용

- ********************************등

□ 추진실적

○ 입상활성탄/모래 초기 시범운영 평가 계획 수립     : 1월.

○ 입상활성탄/모래 초기 시범운영 추진 결과 보고     : 2월.

- **************************************

- ********************************

○ 암사 입상활성탄/모래 초기 시범운영 추진 계획 수립   : 3월.

- ***********************************

- TF팀 구성운영(14명, 본부, 연구원, 정수센터)

※ *****************

[활성탄/모래 구성도]	[활성탄지 모래 포설]	[모래 포설후 층분리]	[자동측정기 설치]

□ 세부결과

○ 영등포정수센터에서 4주간 입상활성탄/모래 시범운영을 실시한 결과,

- **********************************으로 나타남

※ 운영기간 : ‘21.1.27 ~ 2.22.(약 4주간)

▸ *******************************************

TOC(Total organic carbon) 총유기탄소량

- *****************************************

**************

*************************************************

******************************************

***********

******************************************************

*****************************

- *******************************************

○ 암사정수센터로 확대시행 : ‘21.3. ~ 12월(10개월간)

8		정수센터 정비방안 검토 용역(순환정비 등) [정상추진]

❖ 정수센터 **********************의 정비방안 검토 용역

❖ 12월 준공을 목표로 3.23. 착수하여 사업 진행 중

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 정수센터 재건설 등 정비방안 검토 용역

○ 용역기간 : 2021. 3. 23. ~ 12. 17. (약 9개월간)

○ 용역금액 : 175백만원

○ 사업내용

- 정수센터별 계열화 현황 조사 및 계열화 방안

- 지역간 균등·분산 배치, 순환 정비용 정수센터 계획(부지 선정, 용량 검토 등)

□ 추진실적

○ 용역 TF팀(29명) 구성 및 운영 : ‘21.1 ~ 3.

- 순환정비용 정수센터 부지(안), 정수센터별 계열화 방안 등 논의 등

○ 용역 계약 및 착수 : ‘21.3.   ※ 예산집행 실적은 없음.

□ 세부결과

○ 순환정비 방식의 아리수 생산체계를 구축하기 위한 정수센터 분산배치 및 (예비)용량 확보 방안 등 순환정비 방법을 검토하는 용역으로

○ 2월 초 사업공고 하였으나 유찰(1회)로 인해 3월 중순이후 사업착수

※ *************************

*******	*** ****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
*********	*****
******	*****
*****************	*****

9		장기사용 송배수관 정비(교체, 갱생) [정상추진]

❖ 총 15건 공사 중 사업발주 사전절차(11건), 입찰공고 진행(3건)

❖ 비굴착갱생(3건)은 별도 설계용역 시행 결과에 따라 추진예정

□ 사업개요

○ 사업목표 : 정비 14㎞(400㎜이상, 굴착 교체 12, 비굴착 갱생 3)

구분	계	중부	서부	동부	강서	남부	강남	강동	본부
연장(km)	14	1.3	0.3	0.4	1.4	2.5	1.8	1.3	5.0
건 수	15	2	1	1	2	2	2	2	3 (갱생)

○ 사업대상

<79년 이전 매설 도복장강관>	<도장제 탈락 덕타일주철관>	<‘84~85년 덕타일주철관>

○ 소요예산 : *********************

□ 추진실적

○ 설계 및 계약심사 중(11건), 계약의뢰 및 입찰 공고(4건) : 3월

- 사업소별로 사업계약전 사전절차 이행으로 3월말 기준 계약완료 건은 없음

- 3월말 계약심사 완료(중부,서부,남부 각 1건)

○ 본부시행 비굴착 갱생 3건은 별도 용역*에 포함하여 설계 중

*「장기사용 대형 송배수관 정비공사 기본 및 실시설계 용역」: ‘21.4월부터 20개월간 시행

○ 예산집행실적                                    (단위: 백만원)

사 업 명	예산현액	집행액(지출액)	집행률(%)
송배수관 정비	******	***	***

□ 세부결과

○ 사업소별 정비(12건)은 계약심사, 일상감사 등 사전절차 이행

○ *************************************************** 후 공사 발주예정

※ 장기사용 송배수관 정비공사 현황                         (단위: ㎞,백만원)

연번	시행부서		공 사 명	정비구간	소요예산
	계			**	******
1		중부	****	****	*****
2			*********	****	*****
3		서부	*****	****	***
4		동부	*****	***	*****
5		강서	**********	****	*****
6			**********	***	*****
7	굴착 (교체)	남부	****	*	*****
8			********	***	*****
9		강남	*****	***	*****
10			****	*	*****
11		강동	****	***	***
12			*****	***	*****
13	비굴착 (갱생)	본부 (갱생)	*******	*	*****
14			*********	*	*****
15			*************	*	*****

10		대형 상수도관 관세척 ******

❖ 대형관(400㎜이상) 40㎞ 구간을 기계 관세척하는 신규 시행 사업

❖ 시범으로 10㎞구간을 우선 시행예정, 관련 용역계약 사전절차 진행

□ 사업개요

○ 사업대상 : 상수도관 D400~D600mm, L=40km

○ 사업기간 : ‘21.1.1. ~ 12.31.

○ 사업내용 : 작업구 설치 및 관세척 시행

○ 소요예산 : 21억원

□ 추진실적

○ ‘21년 상수도관 세척 사업 추진계획 수립        : ’21.2.

- 관세척 용역과 굴착 등 공사를 분리 시행

► (본부) 사업계획 수립 및 용역발주

► (사업소) 맨홀설치, 굴착협의, 포장복구 등은 각 사업소 연간단가 업체 시행

[업무 흐름도]

	사업계획 용역발주	➪	도로굴착 맨홀설치 등	➪	관세척 시행	➪	결과보고
	본부		사업소		용역사		본부

○ *******************            : 3.12.

- ********************************

***********************************

***** **********************************************************

○ 계약심사, 일상감사 등 사전준비               : 3월

○ 예산집행실적                                    (단위: 백만원)

사 업 명	예산현액	집행액(지출액)	집행률(%)
대형 관세척	*****	0	0

□ 세부결과

○ 대형관(400㎜이상) 1,634㎞ 중 20㎞ 구간을 기계 관세척하는 신규 시행하는 사업임

○ 총괄계획(2.9), 관세척 용역계획(3.12) 수립으로 금년 추진방향에 대한 계획은 완료된 상황이나

- *************************************************************

********************************************

[기술경진대회 관세척 공법 예]

< C.T 특허공법 >	< PIC 공법 >	< SFT 공법 >

○ *********************************************************************

- ********************************************

11		행정동별 수질자동측정기 설치 [정상추진]

❖ 수질자동측정기 307대(‘20년 이월 154, ’21년 153) 신규설치 예정

❖ 사업소별 용역(‘20년 이월분) 사업자 선정(적격심사) 진행

□ 사업개요

○ 사업내용 : 수질자동측정기 307대 신규설치

○ 소요예산 : ******백만원  ※ 국비 50%지원         (단위:백만원)

구 분	계	2020년(이월)	2021년
설치 대수(신규)	***	***	***
사 업 비	******	*****	*****

※ 수질자동측정기 (기존) 설치 현황 : 228대(배수지 111, 급수관 117)

□ 추진실적

○ 실시간 수질감시시스템 설치계획 수립                : ‘21.3.

○ 사업소별 용역(‘20년 이월분) 발주 및 사업자 선정 적격심사 진행

- 사업소별 설치계획

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	307	51	34	47	31	40	44	28	32
상반기(이월분)	154	25	17	24	16	20	22	14	16
하반기(‘21년)	153	26	17	23	15	20	22	14	16

※ 업무 흐름도

위치선정	➪	공사(1차)	➪	공사(2차)
설치지점 최종선정 (유지관리 용이한곳)		배수관분기 공사 (분기20㎜, 배관13㎜) 측정기 기초 및 배수공사		측정기 설치공사 디지털 수압계 설치공사 전기·통신공사
수도사업소(행정지원과)		수도사업소(급수·시설관리과)		수도사업소(행정지원과)

○ 예산집행실적                                    (단위: 백만원)

사 업 명	예산현액	집행액(지출액)	집행률(%)
수질자동측정기 설치	11,414	0	0

□ 세부결과

○ 수질자동측정기 307대(‘20년 이월 154, ’21년 153) 신규설치 예정

- (‘20년 이월분) ’21.3. ~ 9.

- (‘21년 설치분) ’21.5 ~ 11. 일정으로 추진할 계획

- 일부 수도배관 및 전기공사의 도로굴착 승인 지연사례 발생으로 자치구와 지속 협의

○ 신규 설치대수 증가로 차질없는 준공을 위해 정도 검사기관(한국산업기술연구원)의 사전일정 협의 추진 및 관리인력 충원(9명)을 市에 건의

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제7조 2항 : 측정기기를 사용하는 자는 사용 전에 최초 정도검사를 받아야 함

<수질자동측정기 설치 추이>

수질자동측정기 (감시항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온)

12		주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 [정상추진]

❖ 1분기 실적 10,770가구로 목표(연 19,000가구)대비 56% 지원

❖ 일부 사업소의 경우 조기 예산 소진으로 추경확보 필요

□ 사업개요

○ 지원대상 : ‘94.4.1. 이전 건축물 중 옥내급수관이 비내식성관인 주택

○ 지원목표 : 19,000가구(11,182백만원)                 (단위 : 백만원)

구 분	계	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가 구 수	19,000	-	600	1,000	2,000	11,100	800	900	2,000	600
예 산 액	11,182	15	280	462	922	7,214	372	418	1,219	280

- 지원규모(최대) : 단독 150, 다가구 500, 공동주택 세대별 60~80만원

□ 추진실적

○ 1분기 실적은 10,770가구로 연간 목표대비 56% 지원

○  사업소별 추진실적                                 (단위 : 가구수)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
***	******	***	*****	*****	******	***	***	*****	***
****	******	***	***	***	*****	***	***	*****	***
*** ***	****	****	****	****	****	****	****	****	****

○ 예산집행 실적                                      (단위 : 백만원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
*****	******	***	***	***	*****	***	***	*****	***
*** ***	*****	***	***	***	*****	**	***	*****	***
	******	******	******	******	******	******	******	******	******

□ 세부결과

○ 「노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침」 개정(1.11)으로 신속하고 적정한 공사비 지원이 이루어지도록 개선

- 공사 완공상태 검사 업무를 현장민원과로 일원화

- 사업소 지원실적 공문제출을 GIS 시스템 입력으로 대체 개선

○ 아파트 공동주택의 신청 급증으로 목표 조기달성이 예상되나, 일부 사업소의 경우 조기 예산 소진으로 추경확보 필요

- 아파트(478건, 53억), 단독·다가구·연립주택(548건, 8억)지원 등 유형별 격차 큼

*****************************

******

○ 지원절차(단독·다가구·소규모 공동주택)

옥내급수관 진단신청	➪		진단(컨설팅) 및 지원여부 통보	➪		공사비 지원신청서 제출		➪
수요가			수도사업소			수요가
공사비 지원심의 및 승인	➪	공사시행 완료 후 지원금 교부신청			➪		현장확인 및 지원금 교부
수도사업소		수요가					수도사업소

13		장기사용 배급수관 정비 [정상추진]

❖ 배급수관정비 21건 공사 중 계약완료(8건), 입찰 공고(13건) 진행

❖ 공사불편 민원과 현장 어려움 해소를 위한 다양한 대응방안 검토중

□ 사업개요

○ 사업목표 : 정비 28㎞(350㎜이하)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표 (㎞)	28	4.4	4.7	7.1	1.9	1.7	2.7	3.8	1.7

○ 사업대상 : 84~‘85년 매설 덕타일 주철관(시멘트·무라이닝관)

- 노후도 평가기준 및 수질사고가 우려되는 취약 상수도관 정비

1984년	1986년	2012년	2013년

○ 소요예산 : **************************

□ 추진실적

○ ‘21년 장기사용 배급수관 정비계획 수립           : ’20.12.

○ 각 사업소별로 배급수관정비 21건 공사 발주 및 입찰 공고 : 3월

- 1분기에 8건 계약완료, 계약의뢰 및 입찰 공고 13건 진행

[사업소별 공사현황]

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
공사건수	21	3	3	4	2	2	2	3	2

○ 예산집행실적                                    (단위: 백만원)

사 업 명	예산현액	집행액(지출액)	집행률(%)
장기사용 배급수관 정비	******	*****	***

□ 세부결과

○ 전 사업소 21개의 공사가 발주, 3월말 기준 대부분 입찰공고가 완료되어 차질없이 진행

○ 장기사용 배급수관 정비는 ‘84년 ~’85년 부설된 덕타일 주철관을  ‘20년부터 ’24년까지 5개년 동안 총 206㎞ 정비 교체 하는 사업으로

-  ‘20년 23㎞ 정비에 이어 금년 28㎞ 정비할 계획

-  **************************************************************************************************************

****

****************	******************

○ 다만, 공사시행에 따른 민원과 지하 매설물 과다로 관 부설 공간 부족 등 어려움이 예상되어, 관계기관 협의, 철저한 도면확인, 사전 시험굴착 등 다양한 대응방안을 마련할 계획인 것으로 파악

14		광암수계 배수관로 정비 ******

❖ 총괄 정비계획수립, 교통소통대책 및 전기방식공사 용역 계약완료 및 착수

❖ 하천내 작업구 침수대책 검토 등 추가 설계사항 발생으로 다소 지연

□ 사업개요

○ 사업대상 : 광암수계 배수관로 정비(1공구) 8.9㎞

○ 사업기간 : 2021.~2026.(65개월)

○ **************************************************

*******************

********************* ******************

** ***********************************************

〈 전체 사업개요〉

▸ ***********************************

************************

********************

****************************************************************

***

구 분	‘21~’26 (1공구)	‘23~’27 (3공구)	‘25~’27 (2공구)
위 치	- 풍납사거리 ~ 탄천1교 - 서울·세종 고속도로 병행구간	몽촌토성역~봉은배수지	정수장구내~풍납사거리
규모	D=300~1,800㎜ L=8.9㎞	D=1,000~2,800㎜, L=10.1㎞	D=80~1,500㎜, L=5.0㎞
소요예산	828	498	360

□ 추진실적

○ 광암수계 배수관로 정비공사 발주계획 수립       :  ‘20.12.

○ 교통소통대책 수립용역(1공구) 계약 및 사업착수   :  ’21. 3.

- 용역기간 : ‘21. 3. 8.~ 5. 26.(약 3개월)

- 용역금액 : 179백만원

○ 광암수계 배수관로 전기방식공사 추진계획 수립  : ‘21.3.

- 사업기간 : ‘21.5 ~ ’21.6.

- 소요예산 : ***********************************

- 사업내용 : 전기방식 13개소의 정류기 교체 및 양극 보강

○ 예산집행실적                                    (단위: 백만원)

사 업 명	예산현액	집행액(지출액)	집행률(%)
************	******	-	-

□ 세부결과

○ 광암정수장 송수관 적정 구경확보 및 장기사용 송배수관 정비를 위해 *********************예정으로 공정은

- (1분기) 공사계획 수립, 교통소통대책 용역 착수

- (2분기) 기술용역 타당성 심사, 사업수행능력 평가, 일상감사 등 사전절차 추진예정

- *****************************************************************************

○ 경제성, 시공편리, 민원 최소화를 위해 전체의 약 88% 구간을  비굴착으로 설계 시행

-  *********************************************

[굴착 교체방식]	[신관 삽입 공법]	[비굴착 갱생 방식]

15		상수도 GIS DB 정확도 개선 [정상추진]

❖ 4개 사업 용역 공고 및 제안서 평가를 통해 우선협상자 선정완료

❖ 4월 중 사업 착수하여 1차(금년 12월까지), 2차(‘22.3.) 추진예정

□ 사업개요

○ 사업대상 : 80mm 이상 도․송 · 배수관로(360㎞)

○ 사업기간 : ‘21. ~ ’22.3.

○ 소요예산 : ********

○ 사업내용

- 신설 및 기존관로 조사/측량 및 DB 구축(신설 120㎞, 기존 240㎞)

- 누수복구 등에 의한 노출 상수관로 측량 및 DB구축

※ 전체 사업개요(2005 ~ 2024년)

□ 목표 : 10,054㎞ (구경 80㎜이상), ‘20년까지 8,544㎞ 완료(85%)

□ 추진실적

○ ‘21년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 추진계획 수립   : ‘20. 12.

○ 용역 공고 및 제안서 평가(우선협상자 선정)            : ‘21. 3.

- 2개 사업소를 1개 권역으로 묶어 총 4개 권역에서 사업 진행

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
권 역	360	① 90		② 90		③ 90		④ 90
구간(㎞)	360	49	41	47	43	45	45	46	44

○ 예산집행실적                                       (단위: 백만원)

사 업 명	예산현액	집행액(지출액)	집행률(%)
GIS DB 정확도 개선	*****	***	***

□ 세부결과

○ 3월까지 각 권역별 4개사업 용역공고 및 제안서 평가를 통해 우선협상자를 선정완료하였으며, 4월 사업 착수

- 기존관로 취약지역, 신설관로 전구간의 시설물의 위치, 심도 등에 대한 정밀측량을 실시

[업무 흐름도]

시설물 탐사 및 측량 ▸ 신규, 기존관	➪	품질검수 ▸ 권역별 교차점검 ▸ 불탐구간 재탐사 ▸ 성과 심사	➪	GIS DB 구축 및 갱신
용역수행(본부)		(용역, 품질관리원)		(용역, 사업소)

○ **********************************************************************

[**********]

***	*****	*****	*****
******	***	***	***

- 또한 주기적인 안전교육 실시 및 안전장비 점검, 비상연락망 구축 등 현실적이고 효과적인 현장안전관리방안을 마련·실행해야 함

※ 전자유도 탐사원리(계량기 및 밸브에 전류를 보내 형성된 자장을 탐지로 위치 추적)

Ⅳ		향후계획

□ 평가결과 각 부서 통보                         : 4월 말

□ 사업별 공정관리                             : 계속

○ 분기말 이전 자료수합으로 평가 실효성 제고

- 2분기부터 개선 적용  (예, 2분기 실적은 5.20.까지 수합 등)

붙임  1. 1분기 주요사업 공정현황 1부

2. 유충 등 수질관리 사업 공정현황 1부.

3. 사업별 예산집행 현황 1부.

붙임1	1분기 주요사업 공정현황 *******************

연번	*******	*********	********	****
1	********** *********	***************** *****************	********** *******************	*****
2	********** *****	************	******************** ******************	*****
3	********** **********	**************** ************	****************** ********************	*****
4	********* *****	************* ************	*******************	*****
5	********** ********	***********	*********************	*****
6	********** ********	***************************	******************* ****************	*****
7	*********** ******	****************************	****************** ************	*****
8	********* ****** *********	*****************	**********	*****
9	************ *********	*************** ************************	**************** **************	*****
10	******** ********	******************	********************* ************	*****
11	********* *********	******************	***************	*****
12	************ **********	***************	*******************	*****
13	********** ****	***************	****************************************	*****
14	********* **	**************************	************************** ***************	*****
15	*********** ********	*********** * *****************	**************	*****

붙임2	유충 등 수질관리 예방사업 공정현황 *****************

연번	*****		*********	********	****
1	* * * * * * *	*************** ***********	************	**********	*****
2		**************	********* ****	******************** ******************	*****
3		*******************	********* **********	************************ ********************	*****
4		************	******* ************ ***********	*****************	*****
5		******************* ******	******* ************* **********	************ ******** **************	*****
6	* * * * * * * *	************* *******	****************	******** ************	*****
7		**************** *******	********* **************	*****	*****
8		*****************	*********** ***********	****	*****
9		******************* ********	**************	*************	*****
10		*********** *************	**************	***************	*****
11		*********	**************	***************	*****
12	* * * * * *	***************	************** ********	************ *********************	*****
13		************	*******	********************** ***********************	*****
14		***************	***********	******************** **************	*****
15	* * * * * * * * *	*****************	********	******** ***********************	*****
16		*************	***************	************* *****************	*****
17		************* *****	***********	**********	*****
18		************ *********	************ **********	********************** *******************	*****

붙임3	사업별 예산집행 현황

(단위:백만원)

연번	***		***	***	******
	*		*******	******	***
1	*******************		****	-	-
2	***************		**	-	-
3	*******************		**	-	-
4	*************		******	***	***
5	*************		*****	***	***
		*****************	**	**	-
		***********************	***	***	-
		*******************	***	-	-
		****************	***	**	-
		************************	***	-	-
6		*****************	*****	-	-
7	*************		***	-	-
8	**********************		***	-	-
9	*******************		******	***	***
10	**************		*****	-	-
11	***************		******	-	-
12	********************		******	*****	****
13	************		******	*****	***
14	**************		******	-	-
15	*****************		*****	***	***