문서번호	생산관리과-204
결재일자	2022. 1. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	생산관리과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
권창범	신근호	김창중	01/06 김권기
협 조

『정수지(뚝도 2호지) 정비(방수․방식)』

「계열선정 심의위원회」개최계획 보고

2022. 1.

상수도사업본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『정수지(뚝도 2호지) 정비(방수․방식)』

「계열선정 심의위원회」개최계획 보고

정수지의 내구성 향상과 깨끗한 수돗물 공급을 위한 내부 정비(방식)사업 계열 선정을(도막, 패널, 시트) 위한「계열선정 심의 위원회」개최 계획 보고임.

※ 근 거 : 상수도시설물 내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영기준 (’21.1.21.)

Ⅰ		현 황

□ 정수지 현황

구 분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
시설용량 (만톤/일)	480	40	50	70	60	160	100
정수지 현황(지)	32	11	2	3	6	6	4
정 수 지 건설연도	’82~’15	’82	’15	’92	’92(#1, 2개지) ’10(#2, 4개지)	’86(#1, 4개지) ’98(#2, 2개지)	’98

□ 부식방지 현황(총 32지, 완료 13지, 정비 대상 19지)

구 분		계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
소계		32개지	11	2	3	6	6	4
정비 완료	계	13	3	2	2	6
	고도 공사시	7	-	2	1	4	-	-
	센터 자체 정비	6	3	-	1	2	-	-
정비 대상	계	19	8	-	1	-	6	4
	부식방지 無	13	8	-	1	-	4	-
	건설시(에폭시)	6	-	-	-	-	2	4

※ 강북 1개지(4호지) 부식방지 추진 중(’21.7.1. ~ ’22.6.30.)

□ 연차별 정비계획  ※ 광암 8개지 재건설 예정으로 사업대상 제외

구 분	계	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년 이후
대 상	-	강북 4호지	뚝도 2호지	강북 1호지	암사 #1, 1호지	암사 #1, 2~4호지 #2, 1,2호지 강북 2,3호지
(지수)	11	1	1	1	1	7
사업비 (백만원)	23,994	2,100	2,908	2,518	2,281	14,187

Ⅱ		’22년도 사업 계획

********************

*******************************

*****************************************

*************************************************

*******************

**************************************************

************

***********	**************	**********

□ 추진방향

○ 정수지 특성을 고려한 공법 선정

- 정수지는 지하수위 밑에 위치 하고, 외벽이 토사에 직접 접한 구조물임

⇒ 지하수위 영향으로 하자발생 개연성이 큼(수포, 패널탈락 등)

- 통상적인 수구조물과는 다른 정수지 특성을 고려한 공법 선정 필요

○ 정수지 내부 건조를 위한 충분한 작업시간 확보

- 급수운영 문제로 인해 작업시간에 구애받지 않도록 공정 수립

○ 건설사업관리자 투입으로 공사품질 확보

- 정수센터 부식방지공사 발주시 건설사업관리 용역 동시 발주 및 시행

	<서울특별시 수도 조례 개정 (제40조의 5, 2019. 5. 16.)>
정수지 및 배수지 방수․방식 공사의 경우 감독권한대행 업무를 포함하는 건설사업관리를 할 수 있다.

□ 사업추진 절차

부위별 계열 선정요청	⇨	계열선정 심의위원회 개최	⇨	사업 추진방침	⇨	사업참여신청 공고	⇨
(발주부서)		(본 부, ’22.1.)		(발주부서, ’22.1.)		(발주부서, ’22.2.)

객관적 평가 및 기술심의자료 준비	⇨	공법선정 기술심의위원회 개최	⇨	신기술 활용심의 및 공사설계 등	⇨	계약심사, 입찰공고 등 사업추진
(발주부서, ’22.2.)		(발주부서, ’22.3.)		(발주부서, ’21.4.)		(발주부서, ’21.5.)

Ⅲ		「계열선정심의위원회」구성 및 운영

□ 위원회 구성

○ 방  향

- 방수방식 내․외부전문가로 구성하여 다양성과 전문성 확보

- 투명성과 공정성을 강화하기 위해 민간기업체 종사자는 위원 배제

- 서울시 특정기술심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례 준용

-「계열선정심의위원회」위원으로 선정되어 심의에 참석한 위원은 발주부서에서 개최하는「공법선정 기술심의위원회」위원 참여 배제

********

*****************

****************

***************************************************

*******************************************************

***************************************************************

**************************************************************

□ 위원회 운영

○ 의결사항 : 정수지 부위별(천정, 벽체, 바닥, 기둥, 도류벽) 계열 선정

○ 운영기준

- 심의위원 3분의2 이상의 출석으로 회의를 개최

- 위원장을 제외한 출석위원 과반수 이상의 의결로 의사 결정

- 위원장은  회의 운영 총괄, 안건 평가와 의결에는 미참여

․ 계열선정 의결수가 동수일 경우 위원장이 결정(캐스팅보트)

□ 심의 일정

********************************

**************************************

*********************

********

***********************************************

********************************

*************************

○ 진행순서

시 간	내 용	진행	비 고
계			120분
14:00 ~ 14:10	위원회 개회 및 위원 소개	생산관리과장	10분
14:10 ~ 14:20	내부방식 사업개요	생산관리과장	10분
14:20 ~ 14:40	심의자료 보고	뚝도 정수시설과장	20분
14:40 ~ 15:40	토 론	위 원 장	60분
15:40 ~ 15:50	심의위원 의견서 작성	생산관리과장	10분
15:50 ~ 16:00	위원 의결사항 확정	위 원 장	10분

Ⅳ		행 정 사 항

○ (뚝도정수센터)「계열선정심의위원회」심의자료 제출*************

- 정밀안전진단 등 객관적인 자료에 근거해 정확히 작성

○ (생산부) 외부 전문가 심의위원 참석수당 지급

- 산출근거 : 200천원/명 × 4명 = 800천원

- 예산과목 : 영업비용, 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비)

붙임 : 1. 인력풀 및 내부위원 구성 현황 1부(별도).

2. 심의 요청서 및 심의 의결서 (양식) 각 1부. 끝.