문서번호	토목부-17644
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이석근		조성만	09/12 노우성
협 조

지반조사 시행에 따른 실정보고

[디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계]

2014. 9.16.

도시기반시설본부

(토 목 부)

지반조사 시행에 따른 실정보고

[디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계]

우리본부에서 시행중인 「디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시

설계」와 관련하여 사업구간내 지반조사 시행에 따른 실정보고임.

용역개요

용역명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계

위  치 : 금천구 가산동 319-10~독산1동 998-10

규  모 : 도로개설 B=8.7~12m, L=452m (지하차도 290m)

용역비 : 768,933,000원

기  간 : 2013. 5.24 ~ 2014. 10.31

계약자 : ㈜유신, ㈜동일기술공사, ㈜일신이앤씨

지반조사 추진현황

2013. 5.23 : 기본설계용역 착수

2013. 8.16 ∼ 9.12 : 지반조사 시행 (설계반영 4공, 실시공 5공)

2014. 4.10 : 건물부지내 지반조사 시행 협조요청 (교학사,다함이텍)

2014. 5. 9 : 지반조사 추가시행보고 (다함이텍 부지내 1공 추가)

2014. 5.29 : 지반조사 시행에 따른 협조요청 (다함이텍)

2014. 7.15  : 지반조사 시행에 따른 협조 촉구요청 (다함이텍)

지반조사 시행현황

〈 기본설계 - 당초 〉

〈 실시설계 - 변경〉

지반조사 위치변경 경위

현재 교학사와 금천구청간 도시계획시설결정 취소 소송중이며,

교학사 및 다함이텍 부지내 지반조사를 하기위해 본부, 금천구청.

용역사에서 수차례 방문 및 문서협의를 하였으나 협조를 하지 않음.

2014.4.4 실시설계 자문회의시 두산길상 U-Type구간 부력앙카 설치를

위해 암반(연암)층까지 시추를 해야한다는 자문의견이 제시됨.

※ 지하수위 현황

- 안양천 : 14.7m,  - 두산지하차도(BH1~BH5) : -2.6m ~ -9.8m

추진계획

2014. 9.15~9.30  지반조사 및 고지수로 구조검토

2014.10.31.  용역준공

검토의견

교학사 부지내 지반조사 미 시행분에 대하여는 향후 공사시행 시

시추하여 재 확인토록 설계반영코자하며,

다함이텍 부지내 지반조사가 불가함에 따라 종점부 두산길상(U-Type)

지반조사(1공)를 시행하여 암반층까지 시추함이 타당하다고 사료됨.

붙  임 : 지반조사계획서 1부.  끝.