함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(신내동 조압수조 외벽 보수,보강(도장)공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『신내동 조압수조 외벽 보수,보강(도장)공사』의 공사기간 연장에 따른 변경계약을 아래와 같이 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신내동 조압수조 외벽 보수,보강(도장)공사

나. 계 약 자 : 홍인내화(주) 최기식

다. 계약금액 : 85,775,671원

라. 당초공사기간 : 2014. 4. 17 ~ 2014. 9. 17

변경공사기간 : 2014. 4. 17 ! 2014. 11. 20

마. 귀책사유 : 우리사업소

바. 지체상금 : 미부과

사. 연기사유 : 디자인 심의 지연에 따른 착공 지연

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 내부방침 1부. 끝,

	시설관리과장
주무관	김헌중		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	09/12 이시우
협조자
시행	시설관리과-21877	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 행당1동 131~152 142-1 동부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2817	/전송	02)3146-2839	/		/	대시민공개