문서번호	시설관리과-19134
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강서수도사업소장
서장원	손종백	이자원		09/12 이상래
협 조
	급수운영과장		代유인행

·

시설물 보수공사 감독업무 변경에 따른 추진계획

2014. 9

강서수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

시설물 보수공사 감독업무 변경에 따른 추진계획

서울시설공단의 상수도공사 감독위탁 업무범위 조정에 따른 시설물  보수공사 감독업무 변경 추진에 대한 보고입니다.

Ⅰ				추 진 배 경

□ 상수도공사 감독업무 위탁업무 협약 체결 : ‘14. 6. 27

○ 위탁기간 : ‘14. 7. 1 ~ ’16. 6. 30(2년간)

○ 위탁업무 : 배급수관정비, 송배수관정비, 시설물보수 등의 공사감독

※ 단, 「상수도공사 시설물보수 업무」는 자동차전용도로 도로시설물 통합관리

정책결정 (시의회 동의 포함) 이후 제외하기로 한다.

□ 상수도공사 감독업무 위탁업무범위 조정요청(서울시설공단) : ‘14. 7. 3

○ 위탁업무 범위 변경 : 시설물 보수업무 제외

당 초		변 경
- 배급수관정비 - 송배수관정비 - 시설물 보수		- 배급수관정비 - 송배수관정비

【 관련근거 】

○ 서울특별시 자동차전용도로 시설물 관리업무 위탁에 관한 동의안

심사 가결 (제253회 정례회 본회의, ‘14.6.30)

Ⅱ				시설물보수공사 직접감독 시행 현황

- 2014. 9. 1 시행

□ 직접감독 범위 조정

○ 현재 서울시설공단에서 감독위탁하고 있는 시설물 보수공사 중

- 감독 상시상주가 필요하거나 넓은 지역에 분포되어 있어 공사감독이 어려운    사업에 대하여만 시공감독 용역 추진

⇨ 직접 감독대상 : 가압장 ․ 배수지 환경정비, 안전진단 용역, 배수지 항 청소 용역

구 분		현 재	변 경
방법	시공 감독 용역	○ 노후 밸브 교체공사 ○ 소화전 신설 및 보수공사 ○ 가압장, 배수지 환경정비 등 시설물정비 ○ 시설물 보수공사(단위사업) ○ 배수지 방수 ․ 방식공사(단위사업) ○ 안전진단 용역(단위사업) ○ 항 청소 용역	○ 노후 밸브 교체공사 ○ 소화전 신설 및 보수공사 ○ 시설물 보수공사(단위사업) ○ 배수지 방수 ․ 방식공사(단위사업)
	직접 감독		○ 가압장, 배수지 환경정비 등 시설물정비 ○ 안전진단 용역(단위사업) ○ 항 청소 용역(단위사업)

Ⅲ				감독업무 변경 추진 계획

□ 공사 현황

공사명	공사기간	공사개요	시공사	사업비	공정(%)	발주부서
2014 강서구 관내 시설물설치 및 보수공사	2014.4.2. ~2015.3.31	밸브 및 맨홀정비 2353개소 소화전 신설보수 38개소	나일건설 이춘화	917,725천원	40	시설관리과
2014 구로, 양천구관내 상수도시설물 설치 및 소화전 공사	2014.4.30. ~2015.4.30	밸브 및 맨홀정비 352개소 소화전 신설보수 87개소	융성건설 하봉례	901,254천원	40	급수운영과
목동배수지외 8개소 항청소 용역(연간단가)	2014.4.21. ~ 12.31	배수지 9개소(193,620㎥)	트래져건설 박태용	199,813천원	50	시설관리과
목동배수지외 13개소 정밀안전진단 용억	2014.4.2. ~2015.3.31	배수지 9개소(193,620㎥) 가압장 4개소(20,798㎥)	(재)한국건설 품질연구원 김인식	171,900천원	73	〃

□ 공사감독 변경현황

구 분		현 재 (시설관리공단)	변 경 (직접 감독업무)	직접 감독 업무
시설 관리과	강서구	특정다급 정우영	시설7급 서장원	○ 가압장, 배수지 환경정비 등 시설물정비 ○ 안전진단 용역(단위사업) ○ 항 청소 용역(단위사업)
급수 운영과	양천구	특정다급 정성중	시설7급 이일로
	구로구		시설7급 황청년

※ 직접 감독업무 수행자를 지정하여 감독업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅳ				향 후 계 획

□ 직접감독 시행 대상인 가압장․배수지 환경정비 등 시설물 정비, 안전진단

용역, 항 청소 용역은 ‘14. 9월부터 시행

□ 직접감독업무외 노후밸브교체, 소화전 신설 보수, 시설물 보수공사는

시공감독 용역 발주 – 본부 시행 (‘14.10월 ~ ’15.5월)

□ ‘15. 5월 이후 급수공사 ․ 긴급누수복구공사 시공감리위탁과 병행시행

‘15년부터는 소화전 설치 및 보수공사는 급수공사계약업체에서 시행.  끝.