문서번호	교량안전과-537
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
송영배		강천수	01/12 조현석
협 조
	교량기획팀장			민형일
	주무관			정동익
	주무관			이제택

「서강대교 아치리브 점검구 신설 및 확장 」

실시설계 발주 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

서울특별시

(교량안전과)

「서강대교」아치리브 점검구 신설 및 확대

실시설계 발주 계획

서강대교 아치리브와 스트럿 접합부 점검구 신설과 보강형 거더의 기존 점검구 협소로 확대를 위한 실시설계 발주계획을 수립하고자 함.

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	구 분	규 격(m)		구 조 형 식	설계하중	준공연도
			폭 원	연 장
서강대교	마포구 신정동 ~ 영등포구 여의도동	본 선	29~34	1,320	STB, 아치, ILM, FSM	DB-24	’99. 8.
		접속교	29	386	SPG, STB
		A램프	7.5	411.6	STB
		B램프	7.5	441.5	STB

□ 보고내용

○ ******************************************************************

- *********************************

*****************************

*********************************************************	******

○ **************************************************************************************

- *********************************

********	*********

□ 실시설계 발주계획

○ 용 역 명 : 서강대교 아치리브 점검구 신설 및 확대 실시설계

○ 용역기간 : ’22. 2~3월(2개월)

○ 사 업 비 : *******

○ 과업내용

- *************************************

- *******************************

○ 계약방법 : ****

- ***************************

- **************************************

※ ******************

○ 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및 진단, 시설비및부대비, 시설비

□ 시설공사 발주계획

○ 서강대교 아치리브 점검구 신설 및 확대 실시설계가 준공되면 금년 발주된 강교 보수공사(연간단가)를 활용하여 점검구 신설 및 확대공사 시행

□ 향후계획

○ ’22. 1월 : 기술용역 타당섬 심사 의뢰

○ ’22. 2월 : 실시설계 계약 및 착수

○ ’22. 3월 : 실시설계 준공

○ ’22. 4월 : 공사착공

○ ’22. 6월 : 공사준공

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 사업자등록증 1부.