문서번호	물재생과-4640
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
홍민표		강병수	09/12 채희정
협조
	주무관		김근수

토목시설물 유지보수공사 작업지시 계획(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09

중랑물재생센터

물재생과

토목시설물 유지보수공사 작업지시 계획(3차)

서문(관사측)~공무직사무실간 보행자도로상 도로침하(3개소), 탈수기동 지하공동구내 신축조인트 누수(1개소) 및 센터내 도로상 사각지대 구간(2개소) 등 안전사고가 우려되는 부분에 대하여 정비·보수를 시행하여 센터내 시설물 유지관리 및 안전대책에 만전을 기하고자 함.

1		공사개요

가. 공 사 명 : 토목시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 액 : 173,326천원

다. 시 공 사 : 정석티엠에스(주) 대표 김영선

라. 공사기간 : ‘14. 05. 07 ~ 12. 31.

2		보고내용

가.「서문(관사측) ~ 공무직노조사무실」간 보행자도로 개설시 이설 빗물받이의       시공불량(마감불량)으로 인한 토사유실, “보도블록 침하” 3개소 발생으로 보행자      통행시 불편을 초래하여 보도정비가 필요하고,

나. 장마철 탈수기동 지하 공동구내 천정 신축조인트 누수로 인한, 하부 전선배관의      누전사고 우려로 신축조인트 보수 및 유도배수로 설치로 2차 안전사고의 사전 예방      조치가 절실하며,

다. 배드민터장앞 삼거리, 운동장앞 삼거리 도로상 통행차량 사각지대에 접촉사고       발생우려가 있어, 반사경을 설치하여 미연에 사고를 방지코자 함.

라. 보수정비 내역

연번	위 치	현 황	공사내역	비 고
1	서문~공무직 노조사무실간 보행자도로상	빗물받이 인접 보도블록 침하(3개소)	ㆍ보도블록 걷기 및 포설 (1.5m×1.5m, 3개소)
2	탈수기동 지하공동구	천정 신축 조인트 누수	ㆍ조인트보수(4m) 및 유도배수로(SUS) 설치(8m)
3	배드민턴장앞, 운동장앞 삼거리	도로상 사각지대 운전자 시야 미확보	ㆍ반사경 설치(2개소)

라. 작업기간 : 2014. 09. 15 ~ 09. 30.

3		조치계획

가. 위 정비공사를 우선 시행토록 연간단가계약 업체에 작업지시하고, 소요 공사비에       대하여는 실비를 초과하지 않는 범위내에서 반영 정산처리코자 합니다.

나. 예정공사비 : 6,000천원

◎ 보도블록 걷기 및 포설(3개소) : 2,000천원

◎ 조인트 보수 및 유도배수로 설치 1식 : 2,000천원

◎ 반사경설치(2개소) : 2,000천원

붙 임 : 현황사진 및 위치도 1부.  끝.